문서번호	급수운영과-734
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
이덕규	이경재	전명수		01/16 원응연
협 조

송배수관 정비공사

실시설계용역 시행계획 보고

2015.1.

강동수도사업소

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

마천동5~거마가압장간 송배수관 정비공사

실시설계용역 시행계획 보고

송파구 위례택지개발지구 수돗물 공급을 위한 상수도관 부설구간중 2015년 송배수관 정비공사로 선정된 「마천동5~거마가압장간 송배수관 정비공사」 시행을 위해 실시설계용역을 시행하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

○ 상수도사업본부 배수과-23(2015.1.3.)

「2015년 노후 송배수관 정비사업 대상선정 통보」

○ 공 사 명 : 마천동5~거마가압장간 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : D=1000mm, L=400m

○ 총공사비 : 1,700백만원

Ⅱ		보고 내용

○ 실시설계 용역사유

- 위 공사는 성내천 복개구간을 대형상수도관이 횡단하여야 하는 송배수관 정비공사로, 상수도관 추진을 위해 가시설 설치가 필요하며 안전사고예방 및 정밀시공을 위한 적정 공법 적용을 위해 실시설계용역을 시행하고자 함.

※ 『기술용역 공무원 직접시행제도』 대상기준 47개 항목에 해당되지 않음

○ 용 역 명 : 마천동5~거마가압장간 송배수관 정비공사 실시설계 용역

○ 공사위치 : 송파구 거마로 101~거마로 61 (D=1000mm,  L=400m)

○ 과업범위 : 송배수관로 설계(종단면도,횡단면도,추진공법 및 가시설도면 등)

공사시방서 작성, 설계내역서 작성 등

Ⅲ		조치의견 및 추진일정

○ 본청 기술심사담당관에 실시설계용역 타당성심사를 요청한 후 심사결과를 반영하여 실시설계용역 발주하고자 합니다.

○ 총용역비 : 25,850천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비[노후상수도관(송배수관)정비]

○ 용역기간 : 2015.2. ~2015.3.(착공일로부터 45일)

○ 추진일정

- 2015.1월 : 자료조사 및 설계서 작성

- 2015.1월 : 기술용역타당성 심사요청(본청 기술심사담당관)

- 2015.2월 : 용역발주, 계약체결 및 사업착수

- 2015.3월 : 최종 성과물 제출 및 용역 준공

붙임  1. 위치도 및 사진 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.