투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	계림조경(주)(137-838 서울특별시 서초구 서초대로 51, 201(방배동))
(경유)
제목	하늘공원 포토존 조성 공사기간 연기요청에 대한 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 요청한 하늘공원 포토존 조성공사 착공연기와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기하오니 기한 내 공사완료하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

- 당 초 : 2015. 1 .22.

- 변 경 : 2015. 2. 25.

나. 연기사유 : 지속된 한파로 공사(터파기공사, 콘크리트 타설공사 등)의진행이 어렵고 콘크리트 양생의 경우 기온이 낮을 시  하자발생이 우려되어 준공기한을 연기함.  끝.

	서부공원녹지사업소장
★주무관	김숙경		주무관	박미성		공원운영과장	01/16 代조기환
협조자
시행	공원운영과-805	(		)	접수		(		)
우	121-250	서울 마포구 월드컵로 243-60(성산동 390-1)	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02)300-5544	/전송	02)300-5527	/	uldkim@seoul.go.kr	/	대시민공개