문서번호	도시철도설비부-525
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
조영환	황영일	01/19 정찬웅

지하철9호선 2단계 개통대비

9호선 2단계 영업시운전 상황보고(2015. 1. 16.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

도시철도설비부

지하철 9호선 2단계 개통대비

9호선 2단계 영업시운전 상황 보고

2015. 1. 16.(금)

□ 금일실적

급 전	단 전	통 제 자
09 : 42	16 : 47	안승운(서울메트로)

○ 열차운행

- 운행열차 : 임시열차 2편성 8회 운행

- 운행구간 : 1단계 회송 Dia, 2단계 영업 Dia

- 2단계구간 진입 : 제1편성 10:53, 제2편성 11:15

- 개화기지 입고 : 제1편성 15:52, 제2편성 16:10

○ 시운전 열차 운행 결과

- ATO 자동운행 : 정상

- PSD 작동상태

·특이사항 없음

○ 야간 작업 승인(통제:서울메트로)

- 9호선 운영사업소 : 9호선 2단계 전차선로 점검

- 신흥정보통신 : KT 9호선2단계 이동통신 시설공사

- SK텔레콤 : SKT 9호선2단계 이동통신 시설공사

- 현대산업개발(주) : 본선 청소

○ 참여인원 : 9명(본부 4명,서울메트로 1명,기관사 2명,메인트란스 2명)

※ 시운전 상황실 : 안봉용, 조영환, 김경일, 이진근

끝.