함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결 보고(통보) [길음교 송배수관 정비공사(비굴착갱생)]

1. 시설관리과-1685(2015.1.16)호와 관련입니다.

2.『길음교 송배수관 정비공사(비굴착갱생)』건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고 보고(통보) 합니다.

가. 계약건명  : 길음교 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

나. 계약업체 : ******************************

**************************  ************************

다. 계약금액

- 당초 : 금122,475,000원

- 변경 : 변경없음

라. 계약기간

- 당초 : 2014.12.16 ~ 2015.01.24

- 변경 : 2014.12.16 ~ 2015.04.09

마. 변경사유 : 동절기 도로굴착 통제에 따른 절대공기 부족 등

바. 보증서 관련사항

- 계약보증서 : 기한연장(2015.01.25.~2015.04.09.)

- 선금보증서 : 해당없음

붙임 : 1. 공사 변경계약서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 계약보증서 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	은정호		행정관리팀장	김맹순		행정지원과장	서경만		중부수도사업소장	01/19 설동을
협조자
시행	행정지원과-1136	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	3146-2043	/전송	3146-2244	/	younieun@seoul.go.kr	/	부분공개