내 집 내 점포 앞 눈치우기
		서울특별시
수신	서울메트로사장
(경유)	공사관리처장
제목	물가변동 조정금액 적정성 검토 결과 통보

1. 공사관리처-343호(2015. 1. 14)와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 시행한 『지하철 승강편의시설 설치공사(2단계) 1공구』에 대하여 물가변동 조정금액 적정성 검토 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 물가변동 조정금액(차액 : 128천원)

- 당초 : 14,088천원

- 검토 : 13,960천원

나. 사후 정산되는 간접비 중 실제사용 금액 반영분(산업안전보건관리비, 건강보험료 등)이 물가변동 적용대가에 포함되어 과다 산출됨

붙 임 : 물가변동 조정금액 적정성 검토 현황 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							유용일			기술지원팀장					김회중					기술심사담당관					01/19 최진선
협조자
시행			기술심사담당관-916									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 별관2동 2층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-8567						/전송			02-2133-0745					/	yyi0302@seoul.go.kr												/	대시민공개