문서번호	슬러지재활용과-436
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박성철		이동신	01/19 김동기
협조

154kv 변압기 구매설치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

154kv 변압기 구매설치 보고

1987년도 구매설치 사용중인 노후된 154kv 변압기를 철거 및 신규 제작 설치하여 센터내 전력을 안정적으로 공급 하고자 함

☐ 154kv 수전설비(변압기) 현황

종 류	수 량 (대)	정 격 전 압 [kv]	정 격 용 량 [MVA]	설 치 년 도	비 고
3권선유입변압기	4	154/22.9/6.6	11	1호기 : ‘87 2호기 : ‘14 3호기 : ‘96 4호기 : ‘12

☐ 구매계획

○ 1987년도 제작 구매 설치하여 노후된 1호 변압기를 철거 및 신규 제작 구매 설치(예산액 : 1,500백만원)

☐ 추진계획

○ ‘15. 01.10 ∼ 01.20 : 자체 방침

○ ‘15. 01.21 ∼ 03.31 : 설계 및 주요사업심사 실시

○ ‘15. 04.01 ∼ 04.30 : 집행계획 승인, 발주 및 계약

○ ‘15. 05.01 ∼ 10.31 : 물품제작(공사) 설치 시행

○ ‘15. 11.01 ∼ 11.30 : 시운전, 사용전검사 및 준공

☐ 보고내용

○ 초고압 대용량 변압기 제작구매 특성을 감안하여 품질확보 및 안전시공을 위하여 용역설계를 실시하고, 구매 방법은 대용량 변압기 예정가격 적용의 신뢰성이 높은 조달구매(일반경쟁입찰)

○ 전력기술관리법 운영요령 제25조 제9항에 근거하여 전압 10만볼트 이상의 수전설비,구내배전설비,전력사용설비공사는 전기분야 기술사를 책임감리원으로 배치하여야 하므로 기술사 자격을 보유한 업무담당자(박성철)를 책임감리원으로 배치하고 자체감리를 시행함으로써 감리 용역비 절감

- 감리기간 : 210일(‘15.05.01 ~ ’15.11.30)

- 예산절감액 : 약 149백만원.  끝.