문서번호	물재생과-362
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		강병수	01/19 김동기
협조
	★주무관		김근수

청계천 차집관로 준설1구역

작업구 맨홀 추가설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.01

중랑물재생센터

(물재생과)

청계천 1구역(2□2.5×2.8)중 1열에 대해 준설맨홀 부재로 필요시 옆관로로 준설토를 펌핑처리 준설하였으나, 퇴적고 조사결과 H=0.8m 퇴적율 28.5%로 상시 준설이 필요한 것으로 조사되어, 신설(준설맨홀) 설치 3개소를 계획하였으나 차집관로 박스내 준설구간 연장이 너무 길어 작업구 맨홀 1개소를 추가 설치토록『2014년 중랑물재생센터 차집관거 준설공사(연간단가)』계약업체에 작업지시하여 차집관거 유지관리에 만전을 기하고자 함.

청계천 차집관로 준설1구역 작업구 맨홀 추가설치 보고

Ⅰ		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2014년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 6. 05 ~ 2015. 2. 27

○ 도 급 자 : 에이스건설(주)  대표 : 윤창기

○ 도 급 비 : 금573,373,650원

○ 공사개요 : 준설량 : 3,600㎥

- 활차 및 로봇준설 등(혼기젯트 펌프 흡입) : 468㎥

- 버켓준설 : 192㎥, 유입동 : 196㎥, 기계준설 : 2,744㎥

- 기타 부대공사 1식

Ⅱ		문 제 점

○ 청계천 준설1구역 2□2.5×2.8, L=1,720m구간 기계(로더)준설을 시행

중이나 작업구간 연장이(맨홀과 맨홀사이) L=1,200m로 너무 길어

BOX내 작업자의 안전사고 위험 및 작업효율 저하가 우려됨.

Ⅳ		조 치 의 견

○  신답빗물펌프장앞 ~ 용답역(인도교) 중간지점인 L=600m(마장2교 하류20m)지점에 작업구 맨홀(t10×폭2.8m×길이3.0m)을 추가 설치하여 안전사고 예방 및 작업효율을 높이고자 함.

- 변경전 : 작업구 맨홀1개소, 물막이 맨홀2개소

- 변경후 : 작업구 맨홀2개소(맨홀1개소추가), 물막이 맨홀2개소

○ 개략공사비 ; 10,000천원

- 맨홀설치 : B2.8m×L3.0m×1개소(t10)

- 공사금액 : 약10,000천원

○ 소요공사비에 대하여 추후 설계변경시 정산처리하고자 합니다.

붙임서류 : 1. 준설위치도 1부.  끝.