문서번호	정수시설과-182
결재일자	2015.1.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
전철호		안길찬	01/20 박기석
협 조
	행정관리과장			김형규
	주무관			하수용

통합네트워크 게이트웨이 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.01

강북아리수정수센터

(정수시설과)

통합네트워크 게이트웨이 정비계획 보고

정수센터 중앙제어실에 산재되어 있는 『통신 게이트웨이를 통합구축』하여  시스템의 간소화 및 이중화로 안정성 및 신뢰성을 향상 시키고자 함.

❏ 설비현황

게이트웨이	감시 및 제어대상	비 고
ETOS-100	지별탁도계감시, 본부LCGS통신	교체대상(2대)
ETOS-100X	월계배수지감시, 별내유량감시	교체대상(1대)
ETOS-100X	취수유량감시, 지금배수지 수질감시	교체대상(1대)
ETOS-200	조압수조, 월곡배수지감시, 공릉배수지감시, 북악배수지감시 불광배수지감시, 도곡정수장감시, 지금배수지유량감시	교체대상(1대)
ETOS-300	전력감시 제어	교체대상(1대)
ETOS-300X	탈수기동감시 제어, 수질계측기	재사용(본부LCGS)

❏ 문제점

❍ 장시간 사용으로 인한 노후로 통신품질의 저하

❍ 제한된 통신포트로 시스템 확장성이 나쁨

❍ 복잡한 통신방식으로 유지관리의 어려움

❏ 개선방법

❍ 유지관리가 용이하도록 네트워크 장비 통합

❍ 네트워크 이중화로 통신 신뢰도 향상 및 안정적인 시스템구축

❍ 향후 시스템 확장 및 변경이 용이하도록 시스템 구축

❏ 조치계획

❍ 소프트웨어 프로그램 및 게이트웨이 수신반 정비

- 소요예산 : 210,000천원

- 예산비목 : 자본적 지출, 유형 자산취득, 기계장치, 시설비

❍ 사업기간 : ‘15. 01  ~ ’15. 06

❏ 발주방법

❍ 지명경쟁입찰

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조       제10호에 의거 지명경쟁입찰에 의함

❍ 지명업체 선정

- 「중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제9조제1항」에        따른 직접생산 확인 증명서를 소지한 업체로서 지방자치단체를

당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제23조(지명입찰대상자의 지명)에 의한           우수업체 5개사 이상을 조합의 추천을 받아 선정

❍ 계약의뢰 : 본청 재무과(설계심사 : 본부, 계약심사 : 본청)

❏ 추진계획

❍ 설계심사 및 계약심사 : ‘15. 1. 20  ~ ’15. 2. 13

❍ 계약의뢰             : ‘15. 2. 13  ~ ’15. 2. 27

❍ 착공 및 교체작업     : ‘15. 3. 16  ~ ’15. 6. 19

❍ 시운전 및 준공처리   : ‘15. 6. 22  ~ ’15. 6. 30

❏ 효 과

❍ 통신 시스템 간소화로 유지관리 용이

❍ 노후설비 교체로 안전사고 사전 차단

❍ 통신시스템 이중화로 안정성 확보

첨 부 : 설계도서 1부. 끝.