함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	동자동 제8구역 도시환경정비사업관련 소방용수시설 이설계획 변경 알림

1. 관련문서

가. 현장지휘대-10475(2014.10.31.)호 「동자동 제8구역 도시환경정비사업관련 소방용수시설 이설계획 변경 알림」

나. 쌍용건설 제7046-266(2015.1.15.)호 「한강대로 지상식 소화전 추가공사 일정 연기안내」

2. 위와 관련, 우리 관내에서 추진중인 동자동 제8구역 도시환경정비

사업 관련 소방용수시설 이전설치 공사에 대한 추가공사가 필요하여 다음과 같이 일정을 변경하오니, 현장대응단 및 각119안전센터에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 변경사항

구분	기존	변경
일정	2014. 9. 15.~ 2014. 11. 30.까지	2015. 5. 31.까지
변경사유	수도사업소와의 공사협의 지연에 따른 연기

○ 추가공사 내용 : 소화전과 제수변의 간격이 멀어 제수변 위치 변경

○ 대상 소화전 (※ 987, 413호는 공사완료시까지 임시폐전함)

연번	용수번호	용수구분	식구분	주소	설치일자	관할
1	987	소화전	지상식	동자동 37-85	1992-12-01	후암
2	413	소화전	지상식	동자동 37-85	1987-12-01	후암

붙임 : 소방용수시설 이설예정지 위치도 및 사진(987호 등 1개소) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	01/20 김종구
협조자
시행	재난관리과-471	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개