문서번호	방재시설부-825
결재일자	2015.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	방재시설과장	방재시설부장
이정국	이도헌	01/20 임춘근

“신림2 빗물펌프장 설치공사”

정화조 형식변경 외 2건 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

방재시설부

정화조 형식변경 외 2건 검토보고

펌프장 정화조 형식변경 및 관리실 및 관사(사택) 가구 추가설치, 자재 창고 구조변경 설계비 반영 등에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 신림감 제2015-09호(2015.1.14.)

-  사택 및 관리실 가구 추가설치 외 2 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 신림2 빗물펌프장 설치공사

○ 공사규모 : 집수정 V=5,300㎥ / 토출관로 W2.5×H1.0 × 3련

○ 공사기간 : 2013. 01. 04. ~ 2015. 2. 28

○ 도 급 비 : 7,096백만원

○ 시 공 사 : 임원개발(주)외 1

○ 감 리 사 : ㈜도화 외 1

□ 보고내용

○ 정화조 설계 현황

- 정화조(FRP) 상부가 단지내 포장면과의 불일치(돌출)로 설치불가

< 정화조 설치 횡단면도 >

○ 정화조 형식변경(공장제작품 → 콘크리트 각형)

당초
변경	콘크리트 각형

- 당초 : 펌프장(집수정) 상부 슬라브 상에 정화조(FRP) 설치

⇒ 정화조 높이가 높아 펌프장내 포장면과의 불일치(돌출)로 설치 불가함

- 변경 : 펌프장내 포장면에 맞도록 콘크리트 각형 정화조로 변경설치

○ 관리실 및 관사(사택) 가구 설치

- 관악구청(치수과) 요구사항(치수과-284호, 2015.1.8)

⇒ 펌프장 운영을 위한 씽크대, 신발장, 옷장 등

○ 자재 창고 변경에 따른 설계비

- 관악구청(치수과) 요청에 의해 자재 창고 변경(1층→2층, 바닥면적 축소)

⇒ 본부 건축부-13815(2014.11.18)호로 승인 받아 구조 변경(1층→2층)하였으나,설계비 미반영에 대한 반영 요구임

○ 공종별 공사비 증ㆍ감 현황

(단위 : 원)

공 종	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 , 감
정화조 형식 변경 (FRP→콘크리트 각형)	4,826,632	7,739,839	증)29,13,207
관리실 및 관사 가구설치	-	7,622,079	증)7,622,079
자재창고 변경 설계비	-	9,010,000	증)9,010,000
합 계	4,826,632	24,371,918	증)19,545,286	적용 도급비 : 19,545,000

○ 책임감리원 검토의견

- 정화조 형식변경은 정화조 설치 위치에 집수정(콘크리트 구조물)이 있어 FRP 정화조로 설치시 배관의 역구배 및 지상으로 돌출되어 설치가불가함에 따라 현장여건에 맞쳐 콘크리트 각형 정화조로 변경함이 타당

- 관리실 및 관사(사택)에 추가 설치되는 주방씽크대, 현관 신발장 및 숙직실 옷장은 펌프장 근무자가 사용하는 기본 가구로서 변경함이 타당(관악구 요청 사항임)

- 자재 창고 구조변경에 따른 설계비는 관악구청에서 자전도로 및 준설적치장 설치로 인하여 건축물 규모 및 구조 변경되는 사항으로 건축사법에 의하여 건축사가 설계하고 이에 따른 설계비는 직접비만 적용한 것으로 타당

□ 조치의견

○ 상기 감리원 보고내용과 같이 현장여건에 맞추고자 하는 정화조 형식변경 및 자재 창고 구조변경에 따른 설계비 반영은 타당하며,

○ 관리실 및 관사에 설치코자하는 가구는 펌프장 근무자의 기본 가구로서 적정하다고 판단되므로 승인코자 함.

첨부 : 책임감리원 검토의견서 1 부. 끝.