문서번호	시설보수과-522
결재일자	2015.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	강서도로사업소장
전재형	박병연	01/20 조병준

2014 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역

설계변경(정산) 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

강서도로사업소

시 설 보 수 과

설계변경 검토보고(정산)

		용역개요

○ 용역명   : 2014년 도로시설물보수공사 폐기물처리용역

○ 용역업체 : ㈜ 방태 대표 김용남

○ 계 약 일 : 2014. 5. 12(착공 5. 14)

○ 계약금액 : 54,975,500원

○ 용역기간 : 2014. 5. 14 ~ 2015. 2. 28

○ 용역내용 : 폐기물 운반(5,186톤), 폐기물 처리(1,072톤)

※ 폐아스콘 평삭재 발생량 무상처리 계약

		설계변경 내역

○ 물량변경 내역(처리물량기준)                           (단위 : 톤)

연번	공 사 명	성 상	변경전		변경후		증 ․ 감
			운반	처리	운반	처리	운반	처리
1	개봉고가 보수공사	폐콘크리트	68	68	68	68	-	-
		폐아스콘(주간)	449	-	449	-	-	-
		폐아스콘(평삭재)	959	-	959	-	-	-
2	여의2교 보수공사	폐콘크리트	86	86	86	86	-	-
		폐아스콘(주간)	10	-	10	-	-	-
		폐아스콘(평삭재)	-	-	-	-	-	-
3	신정교외2개소 보수공사	폐콘크리트	64	64	64	64	-	-
		폐아스콘(주간)	-	-	-	-	-	-
		폐아스콘(평삭재)	71	-	71	-	-	-
4	화곡터널 외 2개소 보수공사	폐콘크리트	54	54	54	54	-	-
		폐아스콘(주간)	-	-	-	-	-	-
		폐아스콘(평삭재)	1,125	-	1,125	-	-	-
5	일상유지보수공사	폐콘크리트	500	500	365	365	감 135	감 135
		폐아스콘(주간)	-	-	-	-	-	-
		폐아스콘(평삭재)	1,500	-	1,395	-	감 105	-
		준설토	100	100	76	76	감 24	감 24
		혼합폐기물	200	200	51	51	감 149	감 149
6	소 계		5,186	1,072	4,773	764	감 413	감 308

※ 변경사유

시설물보수공사 준공 도래에 따른 폐기물 정산 물량변경

○ 금액변경 내역                                        (금액 :원)

연번	공 사 명	변경전	변경후	비 고
1	개봉고가보수공사	11,400,000	11,400,000		변동없음
2	여의2교보수공사	2,003,000	2,003,000		변동없음
3	신정교외2개소 보수공사	1,886,500	1,886,500		변동없음
4	화곡터널외 2개소 보수공사	8,449,000	8,449,000		변동없음
5	일상유지보수공사	31,237,000	21,267,000	감	9,970,000
	합 계	54,975,500	45,005,500	감	9,970,000

		검토의견

○ 본 폐기물처리용역은 상기의 보수공사(5건) 이전비로 추진하는 용역으로서 공사준공 도래에 따른 물량정산에 따른 증감으로

폐기물처리용역 계약 변경사항 발생하였기에 설계변경 시행코자 함.

		조치계획

○ 상기와 같이 설계변경 시행후 용역업체로 하여금 재계약 하도록 조치

코자 합니다.

첨부 : 설계변경 내역서 1부. 끝