문서번호	하천관리과-1015
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환기획관
김재웅	구자훈	정중곤		01/21 김학진
협 조

수위계 이중화 2단계 추진계획 보고

2015. 01

도 시 안 전 실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

수위계 이중화 2단계 추진계획 보고

펌프 오작동 등의 사고를 사전에 방지하고, 운영 안전성 제고를   위하여 시행중인 수위계 이중화 2단계 사업에 대한 추진계획을   보고 드림.

Ⅰ		수위계 현황

빗물펌프장	설 치 형 식					비 고
	계	초음파식	레이더식	기어식	기 타
114	370	269	39	32	30

Ⅱ		추진경위 및 실적

□ 그간의 추진경위

○ ‘14. 03 : 수위계 이중화 사업계획 보고

○ ‘14. 04 : 자치구 실무자 회의

○ ‘14. 06 : 「수위계 이중화 설치․운영지침」통보 및 의견 수렴

○ ‘14. 07 : 수위계 이중화 프로그래밍(안) 통보

○ ‘14. 08 : 사업 발주(자치구)

○ ‘14. 12 : 1단계 사업 완료(53개소)

□ 1단계 추진실적(‘14년)

○ 대 상 : 빗물펌프장 53개소

○ 내 용 : 수위계 추가 설치 57조/노후 수위계 교체 6조

○ 사업기간 : 2014. 07 ~ 2014. 12

○ 사업비 : 620백만원(재난관리기금 활용)

Ⅲ		2단계 시행계획(‘15년)

□ 사업개요

○ 대 상 : 빗물펌프장 33개소

○ 내 용 : 수위계 추가 설치 35조/노후 수위계 교체 32조

○ 사업기간 : 2015. 01 ~ 2015. 06

○ 사업비 : 600백만원

※ 이중화와 함께 사용년수 20년 이상 경과한 노후 수위계 전수 교체

□ 추진일정

○ ‘15. 01 : 자치구 예산 재배정

○ ‘15. 02 : 사업 발주

○ ‘15. 05 : 수위계 이중화 완료

○ ‘15. 06 : 수문정보시스템 데이터 업데이트

Ⅳ		사업효과

○ 수위계 오류 및 고장에 의한 배수펌프 오작동 방지

○ 수위계 이중화를 통한 안정적인 운영시스템 구축과 유지관리 개선

Ⅴ		행정사항

○ 빗물펌프장 시운전점검(4월중)시 자치구 추진사황 확인

○ 수방기간 전 수위계 전수에 대한 일제점검 및 정비 시행

붙임 : 1) 2015년 수위계 이중화 사업내용 1부.  끝.