문서번호	기전과-624
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
김태수		이영목	01/21 이승진
협조
	관리단속과장		정수현

『북악터널 젯트팬 보강공사』

공사중지 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

북부도로사업소

기전과

공사중지 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인 『북악터널 젯트팬 보강공사』에 대하여 공사중지 및  연기 신청이 접수되어  이에 대한 검토 보고임.

공사개요

○ 공 사 명 : 북악터널 젯트팬 보강공사

○ 공사개요 : 젯트팬철거 11대, 터널보강 20공, 젯트팬 연결보강5set

○ 공사기간 : 2014년 12월 10일 ~ 2015년 2월 28일

○ 계약금액 : 139,000천원

○ 계약업체 : (주)가나오엠

공사중지 사유

○ 터널 상단 천공 작업시 예상치 못한 누수로 도로 결빙에 따른 교통 안전

사고가 우려되고, 동절기 공사로 인한 품질확보에 어려움이 예상됨

○ 시설보수과 북악터널 내부보수 보강 공사와 병행 교통통제 일원화로

통행불편 최소화

조치계획

○ 터널 천공 작업시 예상치 못한 누수로 인한 결빙 등의 안전사고가 우려 되고        시공 품질 확보에 어려움이 예상되어 공사 중지 (2015년 2월 28까지)

○ 통행불편 최소화를 위해 북악터널 내부보수 보강 공사 교통 통제시에            병행 추진함으로서 교통통제 일원화

○ 계약자에게 동절기 공사 중지 통보 (2015년 1월 21~2월 28일)

○ 향후 공사기간 연장 및 사업 사고 이월 조치 예정

붙임 :  북악터널 젯트팬 보강공사 중지 및  연기요청 1부.  끝.