문서번호	도로보수과-253
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		국중진	01/21 이종엽
협조

【2014년 노면표시 유지보수공사(연간단가)】

정산설계변경 검토보고

2015.  1.  21.

성동도로사업소

도로보수과

·

정산설계변경 검토보고

□ 공사 현황

○ 공  사  명 : 2014년 노면표시 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 4. 7. ~ 2015. 2. 28.

○ 도  급  자 : ㈜아남공영  이성우

○ 도  급  비 : 487,060,000원

○ 공사개요 : 차선도색 240,765m, 차선제거 15,960m,

도로표지병 설치 59개, 도로표지병 제거 199개

□ 관련근거 : 건영본 2015-12(2014.1.20.) : 설계변경요청(감리사)

□ 변경 사유

○ 공종별 물량 증․감에 따른 정산설계변경

□ 설계변경 내역

○ 공종별 물량변경내역

구 분	단위	수 량			비고
		당초	변경	증․감
차선 도색	m	240,765	245,014	증4,249
차선 제거	m	15,960	17,871	증1,911
표지병 설치	개	59	86	증27
표지병 제거	개	199	207	증8

○ 공사비 변경내역                                            (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	880,000,000	878,770,000	감1,230,000
도 급 비	487,060,000	488,730,000	증1,670,000
관 급 비	392,940,000	390,040,000	감2,900,000

□ 예산과목

○ 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 노면표시선 도색 및 제거, 시설비(670,000천원)

○ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비(도로굴착복구기금(192,770천원)

○ 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비(8,000천원)

○ 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 도로교통소통개선사업, 시설비(8,000천원)

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 공종별 실작업물량으로 정산설계변경을 시행하여 차선도색 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 1. 정산설계변경내역서 1부.

2. 제비율검증 결과 1부. 끝.