문서번호	전산정보과-535
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전산정보과장	요금관리부장
이순희	홍동섭	01/21 이성규

『Arisu인포시스템』

수전주소 정비 프로그램 개발 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

요금관리부

[전산정보과]

『Arisu인포시스템』

수전주소 정비 프로그램 개발 계획

건축행정시스템의 건축물대장과 Arisu인포시스템의 수전주소를 정비하여 건축물대장의 소유자 변동 정보를 반영하기 위해 수전주소 정비관련 프로그램을 개발하고자 함

Ⅰ		추진배경 및 운영현황

❐	건축행정시스템과 요금관리시스템의 수전주소 정보를 연계하여 수전주소
	정비 DB를 생성하여 소유자 변동정보를 요금관리시스템에 현행화하여 민원인의 이중 변경신청에 따른 민원불편 해소 필요

❐	운영 현황

❍ 서울시 건축행정시스템의 건축물 대장과 요금관리시스템의 수전주소를 직접 대조하여 소유자 변동 정보 반영

❍ 문제점 : 건축행정시스템의 주소 정보와 요금관리시스템의 수전주소 정보 관리체계가 상이하여 매칭되는 비율이 낮음

❍ 운영데이터 현황

(단위:건)

총 수전수	건축물대장 연계 대상				건축물대장 주소 연계 (1년 평균)
	계 (1년 평균)	신개전수 (1년 평균)	주소변경 (1년 평균)	소유자변경 (1년 평균)
2,037,175	14,581	3,388	10,735	458	1,941

※ 건축물대장 연계대상 : 건축물대장과 연계되어 있지 않음

※ 건축물대장 주소연계 : 전체수전을 대상으로 건축물대장과 연계 함

Ⅱ		추진 계획

❐	수전주소 정비 데이터 구축

❍ (구)요금관리시스템의 정비 데이터 분석에 따른 DB변환 및 생성

❍ 건축물대장 연계관련 DB 생성

❐	정비 데이터 현행화 및 소유자 변동분 반영 프로그램 개발

❍ 정비된 데이터와 건출대장과 연계하여 주소 변동 정보에 대한 반영 프로그램 개발

❍ 정비된 수전주소의 소유자 정보 반영 프로그램 개발

❍ 신개전 및 주소 변경시 건축물대장 정보를 비교하여 맞는 정보를 정비 정비데이터 입력하는 프로그램 개발

❐	Arisu인포시스템의 수전주소 정비 프로그램 개발

❍ 건축행정시스템 및 서울시 GIS시스템 연계

❍ 수전주소의 위치확인 및 건축물대장의 주소, 소유자 정보 확인 후 정비할 수 있는 기능 개발

Ⅲ		향후 추진 일정

❐	오픈일자 : ‘15. 3. 30(월)

❐	개발기간 : 약 2개월 (‘15. 1. 20 ~ 3. 27)

❍ ‘15. 1. 20 ~ 2. 9 : 분석 및 설계

❍ ‘15. 2. 10 ~ 3. 9 : 일괄배치 및 메뉴 개발

❍ ‘15. 3. 10 ~ 3. 27 : 개발된 프로그램 테스트 및 시범운영

❐	오픈 일정 및 사용자 매뉴얼 안내(수도사업소) : 2015. 1. 25

Ⅳ		협조사항

❐	서울시 공간정보담당관 : GIS포털시스템 및 모바일 GIS플랫폼 오픈API 요청

❐	서울시 주택정책과 : 건축행정시스템 연계 항목 추가 요청