투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	(주)가나오엠 대표 홍 중 표
(경유)
제 목	공사 중지 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 2014.12.09.일 계약체결하여 공사시행 중인 북악터널 젯트팬 보강공사와 관련하여 아래와 같은 사유로 공사 중지를 통보하오니,

3. 중지되는 기간에 대하여는 공사기간 연장시행 예정임을 알려드립니다                  가. 공사중지 사유

- 동절기 터널 천공작업시 예상치 못한 누수로 결빙 등의 안전                    사고가 우려되고,시공 품질에 확보에 어려움이 예상됨

나. 공사중지 기간  : 2015.1.21. ~ 2.28일.끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	김태수		기전과장	01/21 이영목
협조자
시행	기전과-627	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 913	/	http://www.seoul.go.kr
전화	944-5471	/전송	945-5074	/	k333331@seoul.go.kr	/	대시민공개