문서번호	시설관리과-1442
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
박종한	오준식	우종근	01/21 代이두영

‘14년 기계설비 유지보수(연간단가계약)

제2차 작업완료 및 최종 계약(설계)변경 보고

2015. 1.

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □ 인권 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

‘14년 기계설비 유지보수(연간단가)

제2차 작업완료 및 최종 계약(설계)변경 보고

‘14년도 가압장 모터펌프 등 기계설비 유지보수(연간단가계약)

제2차 작업지시 사항이 완료됨에 따라, 최종 계약(설계)변경 및

정산 등 향후계획을 보고 드림

□ 계약현황

○ 건  명 : 2014년도 가압장 모터펌프 등 기계설비 유지보수(연간단가)

○ 계약상대자

상 호	대표자	주 소	전 화
동원펌프(주)	김덕환	경기도 화성시 팔탄면 현대 기아로 72-42	031-353-9888

○ 계약금액 : 금81,227천원

○ 계약기간 : 2014. 4. 28 ~ 2015. 3. 31

○ 과업범위

- 과업내용서에 따라, 감독원이 지시하는 기계설비의 고장 수리 및

예방정비

※ 단, 작업지시 내역에 없더라도, 기능상 반드시 필요한 추가공정에

대하여는 정비범위를 협의하여 시행할 수 있음(과업내용서 2.2)

○ 대가지급

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제17조 및 동법

시행령 제64조에 의거 접수일로부터 14일 이내 검사․검수

□ 제2차(금회) 작업지시 이행결과

○ 지시내용 : 신림3증압장 가압모터펌프 수리

○ 지시기한 : ‘14.12.17 ~ ’15.1.31 (‘15년 예산배정 일정 감안하여 지시)

○ 수리기간 : ‘14.12.17 ~ ‘15.1.21

○ 작업(보수) 내역

장 소	물 품 명	작업지시 내용	수리 내역
신림3 증압장	가압모터펌프 (1호)	모터펌프(40HP) 1호기 소음, 진동으로 긴급수리	샤프트교체 1개 메탈교체 2개 분해정비 등

○ 보고 의견 : 금회 작업지시 내역이 과업내용서 규정에 따라 차질없이

이행 되었음

□ 향후계획

○ 설계변경 심의위원회 개최

- 심의일 : ‘15. 1. 22(목)

- 장  소 : 시설관리과

- 심의안건 : ‘14년 기계설비유지보수 연간단가 설계변경 적정성 심의

당 초	변 경	증․감
81,227,000	74,342,000	감6,885,000

- 심의위원

․ 위원장 : 시설관리과장

․ 위  원 : 급수운영과 강동길, 이경희 주무관

시설관리과 서규석 주무관

․ 간  사 : 시설관리과 기전팀장

○ 최종 설계(계약)변경 시행

- 변경사유 : 신규 공종 발생 및 계약물량 증․감

- 계약(설계)변경 금액

당 초	변 경	증․감
81,227,000	74,342,000	감6,885,000

- 계약상대자의 계약변경 합의서를 제출받아 계약변경 시행

○ 최종 정산시행

- 정산내역(제2차, 최종)

계약(변경)금액	전회까지 정산금액	금회 정산액	잔액
74,342,000	71,687,110	2,654,890	0

- 예산과목

․상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장․배수지유지보수,

수선유지교체비, 기타교체비

붙임 : 1) 작업완료 및 금회 정산내역서 각 1부.

2) 계약(설계)변경 내역서 1부.

3) 설계변경 심의요청서 1부.  끝.