문서번호	시설보수과-327
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		박용선	01/21 송상영
협 조
	기전과장			김대진
	주무관			김호규

위례터널 인수인계를 위한 사전점검 시행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

위례터널 인수인계를 위한 사전점검 시행

위례터널 공사완료에 따른 시설물 인수·인계와 관련, 기 실시한 합동점검 및 최종점검 지적사항을 현장확인하고, 인수 전 시설물 전반에 대한 사전점검을 시행하여 향후 원활한 공용개시 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ LH 단지사업2부-25(2015.01.16) : 위례 복정사거리 입체화시설 공사완료보고서 협의의견 조치현황 송부 및 공사완료공고 요청

Ⅱ		개 요

○ 총연장 : B=20m, L=2,362m(서울시 1,406m + 성남시 956m)

※ 토공구간+U-Type구간+Box구간+터널구간+Box구간+U-Type구간+토공구간

(70m)      (250m)      (200m)  (1,120m)  (493.5m)    (205m)      (23.5m)

○ 집 수 정 : 3개소(시점부, 중앙부, 종점부)

○ 관리사무소 : 1개동

○ 차 로 수 : 왕복 4차로

○ 피난연결통로 : 차량용 2개소, 대인용 4개소, 피난계단 2개소

○ 염수시설 : 2개소

○ 주요 기전시설물 현황

변압기	비상발전기	배수펌프	CCTV	조명시설	Jet Fan	VMS 전광판	터널진입 차단막
2대	2대	12대	32대	2,312조	20대	2개소	2개소

Ⅲ		점검개요

○ 일   시 : 2015. 1. 27(화) 10:00~

○ 점검방법 : 발주처, 시공사, 외부전문가, 공무원 합동점검

○ 점 검 자

- 안전점검 경험이 풍부한 외부전문가 : 김용진(서현컨스텍), 우종태(경복대 교수)

- 터널 유지관리 경험이 풍부한 공무원 : 서부도로사업소3(토목1, 기전2),

북부도로사업소2(기전2)

- 시설물 유지관리부서 : 시설보수과2, 기전과4

○ 점검내용

- 기 시행한 합동점검 및 최종점검 지적사항에 대한 조치여부 확인

- 시설물 인수·인계 전 시설물 전반에 관한 사전점검

Ⅳ		향후 추진일정

○ 2015. 2월 초 : 민간위탁 운영 전 시운전 인력 조기 투입(기전과 2명)

○ 2015. 2월 초 : 시설물 인수·인계 기관, 청소, 제설 등 시행주체 검토 및

관련부서 협의

○ 2015. 2월 말 : 시설물 인수·인계 완료

○ 2015. 3월 초 : 민간위탁 용역 발주

○ 2015. 3월 중 : 공용개시 및 합동근무(동부도로사업소, LH)

○ 2015. 5월 중 : 용역업체 관리

Ⅴ		조치계획

○ 외부전문가 합동으로 유지관리상 문제점을 사전 점검·확인하여 조치

○ 외부전문가 점검수당은 점검완료 보고후 도로시설과-828(2014.01.16)호에 의거 1인당 20만원/회 지급(2인×20만원=40만원). 끝.