문서번호	도로보수과-329
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	남부도로사업소장
정철식	김승태	01/21 민승기

동공탐사 결과 후속조치

교대역 주변 굴착 조사계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.1

남부도로사업소

교대역주변 굴착 조사계획 보고

지난 2014.11.30.~12.4간 실시한 도심부 주요도로 노면하부의 탐사 결과 발견된 동공지점에 대한 도로굴착 및 원인조사 계획임.

Ⅰ		탐 사 개 요

□ 추진근거 : 무상동공조사 결과 알림 및 탐지된 동공조치(관리)통보

(도로관리과-100, ‘15.1.6)

□ 탐 사 자 : 일본 지오서치(주)

□ 탐사기간 : 2014.11.30. ~ 12.4

□ 탐사결과 : 교대역 주변 13개소 발견

◯ 평가등급 : A급 7개소, B급 2개소, C급 4개소

◯ 등급별 세부개요

등급별	관리 번호	노 선	세부 위치	동공규모(m)			비 고
				토피	세로	가로
A급	2	서초로	교대역 교차로	0.3	0.8	1.4	상부지지층 두께0.3m이내
	3	서초로	서초대로 314	0.2	0.8	0.5
	4	서초로	서초대로 360	0.3	0.8	0.4
	13	남부순환로	남부순환로 2557	0.2	1.5	0.5
	15	강남대로	강남대로 382	0.3	1.4	0.7
	17	강남대로	강남역 5번출구	0.3	0.9	0.7
	18	강남대로	강남대로 299	0.3	0.4	1.2
B급	1	서초로	서초대로 46길 3	0.4	1.3	0.6	상부지지층 두께0.3m이상
	12	남부순환로	서초IC주변	0.4	1.2	0.7
C급	5	서초로	서초대로 360	0.6	0.9	0.4	안전율 A급의 3배
	6	서초로	서초대로 405	0.6	0.6	0.5
	11	우면로	교대사거리	0.6	1.1	0.7
	16	강남대로	강남역 4번출구	0.5	0.8	0.5

◯ 등급별 위치도

Ⅱ		굴착조사 및 복구 계획

□ 동공 후속조치 순서

➀ 동공위치 현장에 표시 → ➁ GPR탐사기로 조사실시(도로포장연구센터) → ➂ 굴착 조사계획 수립(일정계획) → ➃ 외부 전문가 조사단 배정

→ ➄ 굴착조사 후 복구(남부도로사업소) → ➅ 전문가 원인분석 후

항구복구

□ 그간 추진 사항

◯ 2015. 1. 13 : 동공위치 현장에 표시

◯ 2015. 1. 14 : GPR탐사의뢰(남부도로 → 도로포장연구센터)

◯ 2015. 1. 21 ~ 30 : GPR탐사 실시 중 (교통 통제차량 2대 지원)

(※1개소당 평균 1시간 소요됨에 따라 최소 2~3일 필요)

□ 원인조사 방법

◯ GPR탐사 등 장비분석 후 도로굴착 확인

◯ 굴착시 외부전문가 입회하여 의견 수렴

(외부전문가 3명참여, 참여수당은 도로관리과에서 일괄 집행)

□ 굴착조사계획

◯ 대  상 : A,B등급 9개소 (※ C등급 4개소 : 지속관찰)

◯ 굴착조사시기 : 2015. 2월 중

◯ 굴착 확인 방법

- 교통 및 동절기임을 고려 굴착규모 최소화.

- 동공위치 확인 후 임시복구 실시(전문가 원인분석 후 항구복구)

◯ 복구방법

- 단순복구 및 임시복구는『포장도로굴착복구공사(연간단가)』업체.

- 그라우팅 주입등 전문기술이 필요한 사항은 별도 전문업체 선정복구.

Ⅲ		향후계획

□ 지속관찰 실시

◯ A,B등급 9개소 : 항구복구시 까지 주 2회(월,목)육안순찰 실시

◯ C등급 4개소 : 안전율이 높으므로 주 1회(월)육안순찰 실시

◯ 관리대장 작성하여 점검사항 육안 기록관리

□ 향후 일정

◯ 2015. 2월 : A,B등급 9개소 원인분석 및 임시복구 실시

◯ 2015. 3 ~ 4월 : 도로포장연구센터 및 외부전문가 조사분석 의견

검토후 임시 또는 항구복구 실시(포장도로 굴착복구공사)

◯ C등급은 동공의 확장성을 지속 관찰

Ⅳ		행정사항

◯ 도로굴착에 따른 관할구청 및 지하매설물 유관기관 입회 협조

(통신, 한전, 상수도, 하수도, 서울메트로, 신분당선 등)

◯ 교통통제 협조(서초경찰서 교통과, 수서경찰서 교통과)

(원인분석을 위한 특수성을 감안 주간조사 협조)

붙  임 : 1. 동공조사조서(도로관리과)

2. 동공 관리대장 1부.  끝.