문서번호	청계천문화관-401
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	청계천문화관장	서울역사박물관장
조선경	한은희	01/22 강홍빈
협 조
	경영지원부장		박형중
	학예연구부장		박현욱
	총무과장		연규승

청계천문화관 상설전시 리모델링 전시물 제작 설치 용역 준공기한 연장 검토보고서

2015. 1

서울역사박물관

(청계천문화관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

청계천문화관 상설전시 리모델링 전시물 제작 설치 용역

준공기한 연기 검토보고서

『청계천문화관 상설전시 리모델링 전시물 제작 설치 용역』사업과 관련하여 기획전 개막 행사, 강당 외부 대관 행사 등의 진행에 철거 공사로 인한 소음 방지, 외부 이용객 안전 확보 및 서울-북경 교류전과 연계한 콘텐츠 추가·변경 등으로 공사 일정이 지연되어 공기를 연장하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

▣ 사업개요

○ 사  업  명 : 청계천문화관 상설전시 리모델링 전시물 제작 설치 용역

○ 계약업체 : ㈜보국문화(대표 : 권보현)

○ 계약형태 : 장기계속계약

○ 계약금액 : 금1,500,000,000원(금일십오억원정)

- 2014년(1차)-900,000천원, 2015년(2차)-600,000천원

○ 용역기간 : 2014. 10. 13. ~ 2015. 04. 30.(1차 계약 준공일 : 2015. 01. 30)

▣ 준공기한 연기검토

○ 연기기간

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간 (1차 계약)	2014. 10. 13 ~ 2015. 1. 30	2014. 10. 13 ~ 2015. 2. 24	25일 연장
총계약기간	2014. 10. 13 ~ 2015. 4. 30	2014. 10. 13 ~ 2015. 4. 30	-
계약금액	1,500,000,000원 (1차 계약금액 : 900,000,000원)	1,500,000,000원 (1차 계약금액 : 900,000,000원)	-

○ 계약금액 : 변경 없음

○ 연기에 따른 지체상금 부과

- 귀책소재 : 서울역사박물관(청계천문화관)

- 지체상금 : 미부과

▣ 연기사유

- 기획전 개막행사 일정(2014.10.24.), 상설전시실과 인접한 강당에서의 외부 대관

행사 일정과 관련하여 외부 이용객들의 안전 확보와 원활한 행사 진행을 위한 상설

전시실 철거 일정 조정으로 공정이 계획보다 늦어짐

- 동일한 주제와 내용으로 추진 중인 서울-북경 교류전과 콘텐츠·전시구성 관련

연동적인 협의 과정 중 추가·변경된 전시 내용 반영으로 콘텐츠 제작 완성도

제고를 위한 시간 필요

- 안내데스크 증축 관련 미관지구 디자인 심의를 위한 자료 준비 및 성동구청의 건축

심의위원회 개최 일정(2015.2.10)이 계획보다 지연되어 준공 기한을 연기하여 공정

추진에 만전을 기하고자 함

▣ 향후 추진계획

◦	2015. 1. 23	준공기한 연기 의뢰(재무과)
◦	2015. 2. 24	1차 계약분 준공
◦	2015. 2. 25 ～ 2. 27	2차 계약 의뢰(재무과)
◦	2015. 4. 30	리모델링 준공
◦	2015. 5.	전시시설물 시험 운영 및 재개관

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 2014년 기획전 개막행사 및 문화행사 일정표(10월~12월) 각 1부. 끝.