문서번호	서울숲공원관리사무소-414
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장		동부공원녹지사업소장
김윤수	송복식	송동명		01/22 이춘희
협 조	주무관		김덕수
	주무관		라선경

서울숲공원 스케이트파크 바닥 보수정비 계획

2015. 1.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서울숲공원 스케이트파크 바닥 보수정비 계획

서울숲공원 스케이트파크 바닥 균열 및 파손으로 인한 이용객 안전사고 예방 및 편의를 제공하기 위해 바닥 정비공사를 시행코자 합니다.

Ⅰ		대상지 현황

▢ 위    치 : 서울숲공원 스케이트파크

▢ 설치연도 : 2005. 6. <공원 조성시>

▢ 규    모 : 2,290㎡(37.3 × 61.4)

▢ 주요시설 : 쿼터파이프 등 6종

○ 쿼터파이프, 그라인드박스, 플렛레일, 스파인, 뱅크, 런치박스 A,B

▢ 스케이트파크 현황

○ 노면의 노후화로 균열이 발생, 수차례 부분보수를 시행하였으나

○ 겨울철 기온저하로 인해 보수 부분이 올라오거나 심하게 부서지는 등 이용객 안전사고가 우려되어 1월2일자로 폐쇄조치 함.

Ⅱ		추진실적

▢ 스케이트파크 폐쇄 : 2015.1.2

▢ 대한롤러경기연맹 자문 : 2015.1.5

▢ 시설물보수업체 자문 : 2015.1.8

▢ X-게임장 전문설계업체 자문 : 2015.1.12

Ⅲ		정비개요

▢ 기    간 : 2015. 1. 19 ~ 2015. 3. 31

▢ 규    모 : 2,195㎡ (배수로 및 녹지대 제외면적)

○ 스케이트파크 바닥재 재정비 및 X-게임장 기물 보수

▢ 정비방법

○ 자원재활용 및 예산절감을 위해 상부 아스팔트를 철거하고 하부 콘크리트는 균열을 보강 및 아스팔트 덧씌우기 후 아크릴도막 처리

▢ 추진방법

○ 철거 및 포장공사 : 수의계약

- 금액이 소액이며, 신속한 정비를 요하는 사항으로 전문건설업체에 의뢰하여 추진코자 함.

○ X-게임장 시설보수 : 수의계약

- 시설물 이설로 인한 파손 방지 및 신속한 보수를 위해 원 제조.설치업체에 의뢰

○ 관급자재(아크릴도막, 아스팔트콘크리트) : 조달구매(3자단가)

▢ 소요예산

○ 총 공사금액 : 142백만원

- 철거 및 포장공사(2,195㎡) : 22백만원

- 기물보수(도색 및 구조보강) : 22백만원

- 관급자재 구매(아스팔트, 아크릴도막) : 83백만원

- 폐기물처리(혼합폐기물 258톤) : 15백만원

※ 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원, 공원·녹지관리수준향상, 공원관리및도시녹화지원, 동부공원녹지사업소산하공원유지관리, 서울숲공원시설물정비, 시설비

Ⅳ		추진계획

▢ 2015. 1. 26 ~ 1. 30 : 공사발주 및 철거시행

▢ 2015. 2. 1 ~ 2. 28 : X-게임장 시설물 보수

▢ 2015. 3. 1 ~ 3. 31 : 포장정비 (양생온도 확보시)

Ⅴ		기대효과

▢ 노후시설물 정비로 시민불편 및 안전사고 예방

▢ 기존시설의 문제점을 보완하여 재 정비함으로써 시설물의 내구성 강화 및 내구연한 증대에 기여

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.