문서번호	조경과-976
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장	푸른도시국장
조현	하재호	이원영	01/23 오해영

2015년 녹지활용계약 주민쉼터 조성계획

2015. 1

푸른도시국

조 경 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	학생, 교직원 및 주민 등	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	공공조경가	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	해당 자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2015년 녹지활용계약 주민쉼터 조성계획

임상이 양호한 사유지를 대상으로 토지소유자와 우리시(자치구)간 토지의 무상사용과 시설 등의 조성 및 관리에 대한 계약을 통해 지역주민의 소통과 휴식이 가능한 쉼터를 제공하는 “녹지활용계약 주민쉼터 조성사업”을 아래와 같이 추진코자함.

Ⅰ				추 진 방 향

임상이 양호한 사유지를 대상으로 녹지활용계약 체결(5년 이상)

기존 식생 보존 및 정비를 통한 쾌적한 환경 조성

숲 환경 피해를 최소화하는 범위에서 휴게·편의시설 설치

시민들의 자유로운 이용을 돕기 위한 개방 및 안내판 설치 등

Ⅱ				사 업 개 요

사업기간 : 2011. ~ 계속

대 상 지 : 강동구 천호동성당 등 총 11개소

- 신규 조성 : 8개소, 보완·확장 : 3개소

규    모 : 135,660.31㎡

사업내용 : 산책로 및 배수로 정비, 편익시설 설치, 수목식재, 임내정비 등

총사업비 : 4,117백만원

- ‘14년 이전 : 3,267백만원

- ’15년      :   250백만원

- ‘16년 이후 :   600백만원

Ⅲ				2015년 사업계획

대 상 지 : 동국대학교(중구 장충동2가 산14-3)

규    모 : 4,000㎡

사업기간 : 2015. 1. ~ 10.

사업내용 : 산책로 및 벤치 설치, 수목식재 등 주민쉼터 조성

세부 추진계획

- 기존 식생 제거후 일제 조경사업 추진방식 지양

· 기존 식생이 양호한 지역 수목 보존 및 복원

· 기존 식재지 정비 : 하층식생 추가 식재, 고사목 제거, 밀식수목 및 잡목 정비 등

- 숲과 휴식이 어우러진 다양한 테마공간 조성

· 대상지 내 평지와 경사지 내 쌈지형 공간을 확보하여 만남, 사색 및 독서, 소통 및 활동 등이 가능한 커뮤니티 숲 공간 조성

· 테마별 적합한 휴게·편의시설의 적정설치로 다양하고 쾌적한 휴식공간 조성

- 토사붕괴 및 유실 예상지역은 사방시설과 배수로 정비 등을 통한 안정화 조치

- 미관을 저해하는 담장 등은 벽면녹화 등을 통해 차폐

- 중점 추진사항

· 사업 초기 단계부터 분야별 공공조경가(계획, 설계 및 시공)를 참여시켜 수준높은 Public Space 조성

· 이용자 중심의 협의체 구성 및 다양한 참여채널 발굴하여 지속적인 사업참여 유도

< 예 시 >

▷ 설계 단계 : 공간별 세부 아이템에 대한 의견제시

▷ 시공 단계 : 재능기부 참여 유도(나무심기참여단, 스토리벤치 제작단 등)

▷ 이용 및 사후관리 - 청소 등 일반 유지관리(전문 유지관리 : 자치구)

- 쉼터공간을 활용한 소규모 문화행사 추진 등

- 사업 시행 전 녹화계약체결 철저(토지소유자-자치구)

추진기관 : 중구

소요예산 : 250백만원(시설비 247백만원, 시설부대비 3백만원)

예산과목

- 시설비 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 도시녹화(녹지활용계약 쉼터) 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

- 시설부대비 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 도시녹화(녹지활용계약 쉼터) 조성, 시설비 및 부대비, 시설부대비(401-03)

Ⅳ				향후 추진일정

2015.  1월         : 사업계획 수립 및 시달

2015.  1월 ~  2월  : 토지주와 녹지활용계약 체결

2015.  3월 ~  5월  : 설계용역(이용자 의견수렴 및 협의체 구성) 및 설계심의

2015.  6월         : 계약심사 및 공사발주

2015.  7월 ~ 10월  : 공사시행

Ⅴ				행 정 사 항

사업계획수립 및 예산배정     : 서울시(조  경  과)

설계심의                   : 서울시(조  경  과)

녹지활용계약               : 자치구(공원녹지과)

설계 및 공사시행           : 자치구(공원녹지과)

영조물손해배상보험 가입     : 자치구(공원녹지과)

공사착·준공보고 및 개방공고 : 자치구(공원녹지과)

유지관리                  : 자치구(공원녹지과)

붙 임  1. 추진실적(2011.~2014.) 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.

3. 녹지활용계약서(안) 1부.

4. 녹지활용계약 준수사항 1부.  끝.