투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	납품기한 연기요청(슬러지 전처리시설 제작구매 설치)

1. 2014년 단위사업 “슬러지 전처리시설 제작구매 설치”건과 관련입니다.               2. 시운전 기간중 시설물 미비사항 발생에 따른 시설보완으로 절대 시운전 기간 부족에 따라 아래와 같이 납품기한 연기를 요청합니다.

가. 납품기한 연기

구 분	당 초	변 경	조 건
납품기한	2014. 06. 30 ∼2015. 01. 26	2014. 06. 30 ∼2015. 02. 17	지체상금부과

. 끝.

	슬러지재활용과장
주무관	이충기		슬러지재활용과장	01/23 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-575	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-2412	/전송	3146-3579	/	lcgid@seoul.go.kr	/	대시민공개