투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구리암사대교 건설 전기공사 물가변동(제3회)으로 인한 계약금액 조정 검토

1. 암사감리2015-37(2015.01.22)호와 관련입니다.

2. 구리암사대교 건설 전기공사에 대하여 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청이 있어 조달청에 검토 요청하고자 합니다.

가. 공사명 : 구리암사대교 건설 전기공사

나. 계약자 : 모범전설(주) (대표:오세창)

다. 공사기간 : ‘10.07.28 ~ ’15.06.30

라. 물가변동 적용내용

(단위 : 원)

경과기간		지수조정률	계약금액	물가변동 적용대가	물가변동 조정 적용금액
기준시점	비교시점
2011.4.30	2012.2.29	3.21%	5,352,242,400	673,943,400	21,633,000

마. 조치내용 : 나라장터(조달청 통합시스템)를 통해 조달청 검토 요청

바. 관련근거 : 국가재정법 시행령 제21조 5항

- 총사업비 관리대상 사업은 물가변동으로 인한 총사업비를 변경할 시 조달                    청장의 사전 검토를 거쳐야 함.

붙임 : 물가변동 조정보고서(3회) 1부. 끝.

주무관	지장환		열빛총괄과장	代김은덕		설비부장	01/23 박기형
협조자
시행	설비부-946	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	amanhope@seoul.go.kr	/	대시민공개