문서번호	설비부-943
보존기간	년
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		유병기	01/23 박기형
협 조

『서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선 전기공사』

공 사 발 주  계 획 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	-	-	-	-

2015. 01.

도시기반시설본부

설비부

『서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선 전기공사』

공 사 발 주  계 획 보 고

우리 본부에서 추진하고 있는 서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사와 관련하여 착공 시기가 도래한 전기공사를 아래와 같이 발주하여 사업추진에 만전을 기하고자 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

□ 서빙고 고가교 철거 및 강변북로 연결로 개선계획(행정2부시장방침 제483호)

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 서빙고 고가교 철거 및 강변북로 연결로 개선 전기공사

□ 사업위치 : 용산구 한남동 ∼ 동빙고동

□ 사업규모

□ 서빙고 고가교 재설치(2차로=405m, 옹벽설치=208m), 기존 고가 보수(보강=140m)

□ 전기분야 : 가로등(150W)×52등 설치, 교량 내부 점검등(150W)×52등 설치

야간 경관조명 설치

□ 사업기간 : 착공일로부터 2015.12.31일 까지

□ 사 업 비 : 총 금1,274,789천원

구분	합 계	도급비	관급비	이전비
전기	1,274,789,000원	890,931,000원	380,246,000원	3,612,000원

□ 설 계 자 : ㈜동일기술공사 대표 김수보

□ 그간 추진내용

□ 2008.10. 04. : 기본계획 수립(행정2부시장 방침)

□ 2011.01. 06. : 토목공사 착공(준공기한 2015.12.31.)

- 토목업체 : ㈜흥화 / 감리업체 : ㈜한국종합기술

□ 2015.01.21. : 전기공사 계약심사 완료(계약심사과-1016호)

Ⅲ		발주계획

□ 도급공사 발주방법 : 일반경쟁입찰(지역의무 공동도급)

□ 입찰참가자격

□ 전기공사업법에 의한 전기공사업을 등록한 업체이어야 함.

□ 본 공사는 지역의무 공동 도급(공동이행방식) 대상 공사이므로 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 서울특별시에 주된 영업소를 둔 자를 반드시 구성원으로 하여야 하며 지역업체의 시공 참여비율은 49%이상이어야 함. 단, 서울특별시에 소재한 업체는 단독 참여가 가능 함.

□ 공동 수급체 구성원 수는 대표사 포함 2개사 이내로 하며, 대표자는 출자 비율의 비중이 높은 업체로 함.

□ 관급자재 발주방법

□ 관급자재 구매 내용 및 방법

품명	규격	수량	소요예산(천원)	구매방법	비고
가로등기구	컷오프형	52개	15,808	조달구매 (3자단가)	조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의3제1항 제2호에 의거 조달구매 의뢰
가로등주	철제(H:8m)	52본	42,744	〃
램프 및 안정기	CDM150W/220V	52개	2,771	〃
경관조명기구	LED18W	932개	316,880	조달구매 (2단계 경쟁)	다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준 (조달청고시 2014-26호, 2014.10.30)
조달수수료		1식	2,043		3자단가
합 계			380,246

Ⅳ		향후계획

□ 2015. 02. : 시설공사 발주(입찰공고 완료)

□ 2015. 03. : 공사계약 및 착공

□ 2015. 12. : 공사준공

따로붙임 : 공사설명서 1부. 끝.