투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	뉴엔텍(주) 대표 류성호
(경유)
제목	납품기한 연기 알림

1. 뉴엔 15-01-21(2015.01.21.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 귀사에서 계약 시운전중에 있는 “슬러지 전처리시설 제작구매 설치”건의 시운전기간 연장 요청건에 대하여 다음과 같이 납품기한이 연기되었음을 알려드립니다.

가. 납품기한 연기 및 조건

구 분	당 초	변 경	조 건
납품기한	2014. 06. 30 ∼ 2015. 01. 26	2014. 06. 30 ∼ 2015. 02. 17	지체상금부과

.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이충기		슬러지재활용과장	01/23 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-577	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-2412	/전송	3146-3579	/	lcgid@seoul.go.kr	/	대시민공개