투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도토목부장
(경유)
제 목	921공구 총괄 공정표 검토의견 알림

1. 도시철도토목부-624(201.1.16.)호와 관련입니다.

2. 공정만회를 위한 예정공정표 작성에 대한 기계설비.전기분야 검토의견을 아래와 같이 제출합니다.

가. 검토의견

구 분	검 토 내 용
공통 (기계전기)	ㅇ 935정거장과 936정거장의 후속공정(기계, 전기, 건축) 공사 착수예정일이 12개월의 시차가 있어 효율적인 공사진행에 어려움이 많으므로 정거장별 공사착수 시차 최소화(3개월 이내)필요 ㅇ 후속공정(기계,전기,건축) 공사착수전에 필요 자재 반입구 및 환기구 확보 필요

끝.

	도시철도설비부장
주무관	박원모		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	01/23 정찬웅
협조자	주무관	송영무		설비공사과장	이명수
시행	도시철도설비부-665	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85) 도시기반시설본부 도시철도국 시설전기과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7281	/전송	772-7308	/	pwm2000@seoul.go.kr	/	대시민공개