문서번호	물재생과-502
결재일자	2015.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
차성민		김근수	01/26 강병수
협조

청계천 비굴착공사 시행

작업(주간→야간)변경 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01

중랑물재생센터

(물재생과)

청계천 비굴착공사 시행 작업(주간→야간)변경 실정보고

- 청계천 모전교 하류 4개기관(중구청,시설관리공단,중랑물재생센터,본청) 합동점검 결과 물재생시설과-6025(2014.5.14.)호로 요청하신 모전교 하류 L=204m구간에 대해 세정 및 비굴착공사와 관련 주간으로 작업지시하였으나 1차로 일방통행으로 작업여건이 교통 정체 및 경찰서 허가 조건이 야간에만 작업 승인이 있어 야간작업으로 변경하여 차집관로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		공사 현황

○ 공 사 명 : 2014년 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 시 공 사 : 홍익산업개발(주) 대표 정연용

○ 도 급 액 : 금782,840,000원

○ 공사기간 : ‘14. 05. 08 ~ ’15. 02. 27.

○ 공사개요 : D=450~D=500 L= 204m

2		보고 내용

1) 청계천 주간작업에서 야간작업 변경시행

○  청계천(우안) 차집관거 모전교 하류 비굴착공사를 주간 작업지시하였으나 청계천

도로가 1차선 일방통행으로 장비차량의 주차로 통행량 증가시 도로가 혼잡하여         민원발생 소지가 있고, 남대문경찰서 작업 허가 조건이 야간작업(전날 20:00 ~         익일 07:00)으로 허가하여 불가피 야간작업으로 공사 시행하고자 함.

3		조치계획

○ 야간작업 공사를 우선 시행후 설계변경에 반여코자 함.

붙  임 : 1. 현황사진 1부.

2. 실정보고 1부.  끝.