문서번호	시설보수과-273
결재일자	2015.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	전결 01/26 이종엽
협 조
	주무관			김형섭
	주무관			이경수
	주무관			최태석

【 안전한 도로시설물, 행복한 도시 “서 울” 】

2015년 도로시설물 안전점검 및 진단 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

성동도로사업소

【시설보수과】

【 안전한 도로시설물, 행복한 도시 “서 울” 】

2015년 도로시설물 안전점검 및 진단 추진계획

우리사업소(시설보수과)에서 유지관리하고 있는 도로시설물에 대하여 『2015년 안전점검 및 진단 추진 계획』을 수립‧시행하여 체계적인 유지 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

2015년 도로시설물 안전점검 및 진단 추진계획 통보

(도로시설과-976, 2015. 1. 23.)

Ⅱ		추 진 방 향

조직 능력을 적극 활용한 대형시설물 집중점검제 시행

노후 시설물에 대한 중점관리 시행

전문가 그룹(시설안전자문단 등) 안전점검 참여 활성화

시민과 함께하는 안전점검으로 신뢰받는 시정 구현

Ⅲ		현 황

시설물 현황                                             (단위 : 개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	47(3)		23(1)	8			3	12	1(2)
1종	1(2)								1(2)
2종	16		6	2			3	5
법정외	30(1)		17(1)	6				7

※ 1) 청계천복개(좌,우안) : 통계상 북부, 서부도로사업소에 등록

⇒ 성동도로사업소는 황학교~고산자교(연장 1,4km) 구간 관리

2) 마장교(가칭) : 기존 관리외 시설

담당자별 안전점검 대상

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	김형섭(정) 최태석(부)	12	1종	-
			2종	영동대교북단고가차도
			법정외	고산자교, 먹골교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청) 뚝섬고가차도, 행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도, 마장교(가칭)
2	이경수(정) 임승민(부)	13	1종	청계천복개도로(좌안)
			2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도, 답십리굴다리지하차도 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	최태석(정) 김형섭(부)	13	1종	면목천복개도로
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리, 신답고가차도, 청량리1고가차도
4	임승민(정) 이경수(부)	12	1종	청계천복개도로(우안)
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도

※ 1) C등급(4개소) : 장안교(공사중), 청량리1고가(공사중), 중랑교(공사완료), 이문고가(공사완료)

⇒ 보수, 보강공사가 완료된 2개소(중랑교, 이문고가)는 ′15년 정밀점검 결과에 따라 등급 조정

2) 기존 관리외 시설(1개소) : 마장교(가칭)〈 ‘15년 정밀점검시 도면 등 제원 정리하여 통계 반영 〉

점검인력 : 시설보수과장 등 5명

점검기준〔시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 제7조〕

구 분	정 기 점 검	정 밀 점 검	정밀안전진단
대 상	1‧2종,(법정외)	1‧2종,(법정외) 시설물	1종 시설물 (완공후 10년이 지난 시설물)
실시시기	반기에 1회 이상	A등급 3년에 1회 이상	A등급 6년에 1회 이상
		B‧C등급 2년에 1회 이상	B‧C등급 5년에 1회 이상
		D‧E등급 1년에 1회 이상	D‧E등급 4년에 1회 이상
			※ 안전점검 실시 결과, 관리주체가 안전성확보 등을 위하여 필요하다고 인정시
수 준	- 전반적인 외관형태 관찰	면밀한 외관조사 측정및 시험실시 시설물 상태평가	정밀한 외관조사, 측정 및 시험 실시 시설물 상태 및 안전성 평가
시행방법	자체점검	안전진단 전문기관 시설물유지관리업자 외부전문가 합동점검	한국시설안전공단 (특수교량, 1천미터이상 터널) 안전진단 전문기관

※ 1) 법정외 : 2종에 준하여 점검 실시(도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례)

2) 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설 등의 관리 등)

- 중점관리시설 : 반기 1회 점검, 재난위험시설 : 월 1~2회

- 설날, 해빙기, 우기, 추석절, 동절기 등 계절별 취약시기 점검

3) 정기점검은 정밀점검, 긴급점검 및 정밀안전진단 실시기간과 중복되는 경우에는

생략할 수 있음(국토해양부 고시 제2010-1037호)

Ⅳ		‘14년 점검실적

안전점검

○ 정기점검 : 연 2회 이상

○ 정밀점검 : 자체정밀점검(워커힐고가 등 23개소)〈 외부전문가 합동 〉

설날대비 등 안전점검 : 총 6회

○ 점검내용 : 설날, 해빙기, 우기, 추석, 겨울철, 총체적 안전점검

○ 점검인원 :  74명(전문가 29명, 직원 등 45명)

○ 점검결과 :  445건 중 435건 완료(97.8%)

연번	구 분	점검기간	점검시설 (개소)	점검인원 (인)	지적건수(건)
					계	조치완료	미조치
	계	2014년	407	74	445	435	10
1	설날대비 안전점검	2014.01.17~01.27	55	4	35	35
2	해빙기대비 안전점검	2014.02.28~03.31	55	21	96	96
3	상반기 정기점검	2014.03.01~06.30	55	4	109	109
4	총체적(우기,특정관리대상) 안전점검	2014.05.02~05.12	55	4	33	33
5	하반기 정기점검	2014.09.01~12.31	55	3	81	71	10
6	추석대비 안전점검	2014.08.22~09.03	55	4	33	33
7	특정대상시설물 일제조사	2014.09.26~11.28	21	4	0	0
8	시민과 함께하는 안전점검	2014.12.19	1	15	2	2
9	겨울철대비 안전점검	2014.11.17~12.19	55	15	56	56

※ 1) 점검결과 미조치 사항 10건은 2015년 정비예정(기보고, 시설보수과-13호, 2015.1.5)

2) 정밀점검 및 진단 등 중복사항 제외

시민과 함께하는 안전점검

○ 점검내용 : 이화교 안전점검 시행

○ 점검결과 : 1회, 참여인원 15명(직원, 주민대표, 주치의 등)

해빙기 등 안전점검	자체정밀점검 (외부전문가 합동)	시민과 함께하는 안전점검

Ⅴ		‘15년 안전점검 및 진단 계획

정기점검

○ 점검대상 : 50개소

○ 점검방법 : 연 2회 이상

- 정기점검 : 1회 이상 / 반기

⇒ 주 2회 직원 2인 1조(정,부) 실시 ″시설물 점검의 날 운영(매주 화,금)″

- 긴급점검 : 관리주체가 필요하다고 판단한 때

○ 점검절차

- 반기별 시설물 일일점검 계획 수립(별도 계획 수립)

- 정기점검과 계절별 취약시기 점검기간과 중복될 경우 병행 실시

- 보고 및 기록관리

‧ 점검결과 긴급한 사항은 본청 부서장, 해당 팀장, 사업소 부서장 등에게

즉시 보고 체계 유지

‧ 점검결과 및 보수 이력 FMS, 도로관리시스템 입력 철저               - 구조적인 손상부는 전문가 합동점검 또는 긴급점검을 실시하고, 중대한       결함이나 위험요인 발견시 사용제한 ‧ 금지 등 응급조치 후 정비 시행

정밀점검 및 진단

○ 정밀안전진단용역(1개소)

- 용역 대상 : 청계천복개도로(좌안)

- 예  산  액 : 319,167천원

- 업체 선정 : 제한경쟁입찰〔사전 사업수행능력(PQ) 평가〕

- 입찰 자격 : 안전진단전문기관

○ 정밀점검용역(29개소)

- 용역 대상 : 무지개터널 등 29개 시설물

- 예  산  액 :  575,506천원

- 업체 선정 : 지역제한입찰(서울시 소재)

- 입찰 자격

‧ 안전진단전문기관(하자만료 3개소)

‧ 안전진단전문기관 또는 시설물유지관리업체(하자만료 외)

○ 정밀점검 및 진단 대상 현황                             (단위:천원)

연번	용 역 명	대상시설 개 소	대상시설	예산액	담당자	비고
계		30		894,673
1	청계천복개도로(좌안) 정밀안전진단검용역	1	청계천복개도로(좌안)	319,167	이경수	정밀안전진단
2	무지개터널등 3개소 하자만료 정밀점검용역	3	무지개터널,서울숲1지하차도 서울숲2지하차도	38,416	최태석	하자만료 정밀점검
3	면목천복개구조물 등 3개소 정밀점검용역	3	면목천복개구조물, 서울숲 다리교, 신답고가	102,900	최태석	정밀점검
4	이문고가 등 4개소 정밀점검용역	4	이문고가, 청량제1고가 안암교, 종암교	83,732	최태석	정밀점검
5	고산자교 등 5개소 정밀점검용역	5	고산자교, 무학교, 정릉천교 황학교, 두물다리(청)	71,996	김형섭	정밀점검
6	행당고가 등 3개소 정밀점검용역	3	행당고가, 성동지하차도 마장교(가칭)	66,605	김형섭	정밀점검
7	군자교 등 5개소 정밀점검용역	5	군자교, 성동교(신,구) 장평교, 전농교	101,311	이경수	정밀점검
8	중랑교 등 3개소 정밀점검용역	3	중랑교, 동진교, 용두4교	56,457	임승민	정밀점검
9	용두교 등 3개소 정밀점검용역	3	용두교, 제1제기교, 제2제기교	54,089	임승민	정밀점검

기타 안전점검

○ 시민과 함께하는 안전점검(10월 예정 : 별도 계획 수립)

- 대상시설물 : 청계천복개도로(좌안)

- 관할구 시의원, 구의원, 통장, 주민대표, 주치의 등과 합동점검

○ 시설안전자문단(외부전문가) 합동점검 : 해빙기, 동절기 대비, 긴급점검 등

연번	구 분	점 검 기 간												계	점검시설		비고 (용역)
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		외부전문가 합동점검	자체점검
	계													423	101	292	30
1	정밀점검 및 진단													30			30
2	설날대비 안전점검													50		50
3	해빙기대비 안전점검													50	50
4	상반기 정기점검													50		50
5	상반기 특정관리대상 안전점검													21		21
6	우기대비 안전점검													50		50
7	하반기 정기점검													50		50
8	추석대비 안전점검													50		50
9	하반기 특정관리대상 안전점검													21		21
10	시민과 함께하는 안전점검													1	1
11	겨울철대비 안전점검													50	50

‘15년 안전점검 추진일정

Ⅵ		행 정 사 항

안전점검 계획 수립 및 시행

○ 도로시설과 안전점검 계획을 반영한 세부계획 수립 시행

점검결과 조치

○ 경미한 사항은 현장 시정조치 또는 일상유지보수업체로 하여금 조치

○ 보수 예산 수반 및 구조적 사항은 별도 보수ㆍ보강 계획 수립 시행

○ 안전점검 및 조치결과는 도로관리시스템, FMS 입력 및 도로시설과에 제출

※ 안전점검 결과 미조치사항에 대하여는 조치 완료시까지 추적관리

점검수당 지급

○ 점검수당 지급(해빙기, 겨울철대비, 긴급점검 등)

- 안전점검 결과 보고서에 의거 수당 지급

※ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영, 도로시설물                          안전자문단 운영, 사무관리비

- 점 검 수 당

구 분		점 검 수 당	비 고
현장점검	외부전문가 자문위원	200,000원 / 인 ․ 회	∙ ′15년 엔지니어링대가 기준에 따라 지급 특급기술자 노임(‵15. 2월말 발표예정) ※ 14년 특급기술자 노임(247,598원/일) → 적용 : 200,000원/회
	시의원, 구의원, 연구원, 시민	100,000원 / 인 ․ 회	∙ ‘15년 서울시 예산편성 잠정기준의 위원회 참석수당 지급기준에 준해서 점검수당 지급 ∙ 기본 10만원, 초과 5만원(2시간 이상시)
자 문		100,000원 / 인 ․ 회	∙ ‘15년 서울시 예산편성 잠정기준의 위원회 참석수당 지급기준에 준해서 점검수당 지급 ∙ 기본 10만원, 초과 5만원(2시간 이상시)

첨부 : 2015년 도로시설물 안전점검 추진계획(도로시설과) 1부.  끝.