문서번호	도시철도설비부-744
결재일자	2015.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		정보통신과장		도시철도설비부장
박규영		추경수		01/26 정찬웅
협 조
	송변전과장				김형기

9호선 2단계 AFC 시스템 완성도 검증을 위한

개집표기 연속통과시험 실시계획 보고

2015. 01

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 ■	(	LG CNS	)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울메트로	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

9호선 2단계 AFC 시스템 완성도 검증을 위한

개집표기 연속통과시험 실시계획 보고

우리시 신교통카드 기술규격 반영 설치된 9호선 2단계 AFC 설비 완성도 검증을 위한 개집표기 연속통과시험을 우리본부 직원 인력으로 실시하여 적기 개통에 만전을 기하고자 함

※ 추진근거 : 9호선 2단계 적기개통을 위한 자동요금징수설비(AFC) 종합시험계획 보고 (도시철도설비부-427, ′15. 1. 15)

1		설비 현황

개집표기	발매기	환급기	정산기	역전산기	중앙전산기
76대	10대	5대	7대	5대	1대

2		시험 목적

❍ 개집표기 교통카드 인식 및 거래데이터 집계 검증

❍ 개집표기 최대 승객 통과 처리 능력 확인

❍ 개집표기 H/W(승객감지 센터, 플랩동작 등) 정상 기능 확인 등

3		시험 내용

❍ 주요시험내용

- 다양한 교통카드 소지 승객이 27명/분당 이상 개집표기 통과 여부 확인

- 교통카드 데이터 처리에 이상이 없는지 판단하기 위한 개집표기 최대 통과 후 집계시스템내 거래데이터 집계확인

- 개집표기 승객 감지 센서 기능 확인 및 교통카드 단말기 수신감도 확인

❍ 주요시험기준

시험 항목	세부 구분	수행기준 및 조건	시험 통과 기준치
개집표기 연속통과 부하시험	수도권 교통카드 전종	개집표기 연속 승/하차 태그 10분 실시 (개집표기 전통로)	- 분당 27명 이상 통과 - 요금집게 데이터 오류 0% - 플랩 오동작 0회

❍ 시험통과기준 : 98% 이상(교통카드 및 단말기 상태에 따라 통과 저하요인 있음)

4		시험 일정

❍ 역별 일정 및 인력동원계획 / (총 170명/일 인력 동원 실시)

시험일자	정거장	동원일력	설치개소	설치도면
02. 09(월) 오전(10:00~)	927(선정릉)	총 40명 - 본부(20명), 서울메트로(10명) LG-CNS(10명)	환승역 개집표기 2개소	붙임 도면 참조
02. 10(화) 오후(14:00~)	926(언주)	총 30명 - 본부(10명), 서울메트로(10명) LG-CNS(10명)	일반역 개집표기 1개소
02. 11(수) 오후(14:00~)	928(삼성중앙)	총 30명 - 본부(10명), 서울메트로(10명) LG-CNS(10명)총
02. 12(목) 오후(14:00~)	929(봉은사)	총 30명 - 본부(10명), 서울메트로(10명) LG-CNS(10명)
02. 13(금) 오전(10:00~)	930(종합운동장)	총 40명 - 본부(20명), 서울메트로(10명) LG-CNS(10명)	환승역 개집표기 2개소

❍ 시험방법 교육

- 시험 당일 20분전 시험목적 및 시험방법 설명 후 진행

❍ 시험결과 분석 보고

- 집계시스템내 수집된 거래데이터 분석 승객 통과능력 확인보고 / 2월 16일

개집표기 연속통과 시험	다양한 교통카드 인식시험	교통카드 데이터 수신 확인

5		사전준비사항

❍ 개집표기 교통카드 인식, 동작 및 요금집계 등 사전시험 완료 / 2월5일전

❍ 시험용 교통카드 준비 / LG-CNS 및 한국스마트카드(KSCC)

❍ 시험요원 단체유니폼 준비 / 한국스마트카드(KSCC) / 60벌

❍ 시험요원 동원 / 본부(도시철도설비부) 20명, LG-CNS 10명, 서울메트로 10명

- 본부 시험인력 명부 작성 및 서울메트로 인력지원 요청