문서번호	시설관리과-1941
결재일자	2015.1.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
배경희		최재영	01/26 오기석
협조

급수공사 연기보고서

(장안동 장안동406-3, 신설-132)

2015. 1

명에 의거 동대문구 지역담당 업무 수행 중 공사기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

가. 공 사 명 : 2014년 제기동 외 6개동 상수도공사(연간단가계약)

나. 도 급 자 : 기흥건설  대표 박환창

□  보고내용

○ 급수공사 작업지시 사항 중 아래와 같은 사항으로 부득이 공사기한 연기가 필요한 실정임.

공사 종류	공사위치	공사개요	연기 사유	공사일자
				당초	변경
신설-132	장안동 406-3	D=50m, L=5	건축공사 현장 작업지연으로 인한 급수공사 연기요청	2015.01.14. ~2015.01.23	2015.01.14. ~2015.01.28

□  처리의견

○ 원활한 공사시행을 위해 공사기한을 연기하여 공사현장 안전관리 및 민원처리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.