문서번호	건축부-879
결재일자	2015.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
정제국		강성욱	전결 01/26 김우성
협조

- 옛시장공관리모델링 및 한양도성 순성길 연결공사 -

석면조사 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(건  축  부)

- 옛시장공관리모델링 및 한양도성 순성길 연결공사 -

석면조사 실정보고에 대한 검토보고

옛시장공관리모델링공사 추진과 관련하여 기존 건축물 해체 전 석면조사를 실시코자 하는 시공자의 실정보고를 아래와 같이 승인코자 합니다.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 옛시장공관리모델링 및 한양도성 순성길 연결공사

○ 공사내용 : 지하1/지상2, 연면적 683㎡ 리모델링, 도로단절구간 24m 철골조 교량설치

○ 시공자 : 현도종합건설(주)

○ 사업추진 경위

- 2015.01.05. 공사착공

- 2015.01.14. 설계설명회 개최(Kick-off Meeting)

- 2015.01.23. 석면조사 실정보고 제출(시공자 → 건축부)

Ⅱ		실정보고내용 및 처리의견

○ 실정보고 내용(문서번호 : 현도 제2015-007호)

- 건축물 철거 공사전 기존 건축물 내 석면 포함여부 조사 실시(3개동)

※ 견적금액 : 금300,000원(부가세 별도)

○ 처리의견

- 본 공사는 산업안전보건법 제38조의2 및 동법시행령 30조의3 규정에 따른 기관석면조사 대상으로, 원활한 공사추진을 위해 우선 시공자의 실정보고사항을 승인하여 석면조사를 실시하고, 계약금액은 추후 관련 절차에 조정코자 합니다.

Ⅲ		향후계획

○ 2015.01.27. 석면조사실시

○ 2015.01.28. 총무과 물품 반출

○ 2015.01.29. 내부 철거공사 시행 예정(※ 석면 함유 확인시 석면해체 공사 시행)

붙임문서 : 실정보고서 – 1부

동바리설계도면 - 1부.  끝.