문서번호	도시철도토목부-1047
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장		도시철도국장
황왕연		김성호	한동근		01/27 김준기
협 조
	도시철도건축부장			이병석
	도시철도설비부장			정찬웅
	토목2과장			방영복

『916,917공구 전면책임감리용역 관련』

준공기한 연기 및 감리원 투입계획 조정 검토보고

2015. 01.

서울시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『916,917공구 전면책임감리용역 관련』

준공기한 연기 및 감리원 투입계획 조정검토 보고

『지하철9호선 2단계』구간을 ‘15.03월말 개통예정으로 현재 시설공사 마무리 공사 추진중이며, 개통 및 마무리 공사를 원활히 추진코자 개통후 1개월까지 감리용역 기간을 연기코자 하며, 이에 따라 투입된 감리원의 등급을 조정하여 추가비용이 최소화 될 수 있도록 시행코자 보고드림.

Ⅰ		감리용역 현황

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울지하철9호선2단계 건설공사 전면책임감리용역(916~917공구)

○ 위    치 : 논현동 ~ 삼성동 COEX ~ 종합운동장

○ 규    모 : 총연장 4.5km, 정거장 5개소(환승역 2)

○ 감리기간 : '07. 12. 31~ '15. 01. 31

□ 공구별 계약현황

(단위 : 백만원)

공구	도급자	계약금액		감리용역 기간		비 고 (‘15감리비)
		총괄	진행중인 차 수	총괄	진행중인 차 수
916	㈜유신 외 4	4,816	743 (7차)	‘07.12.31 ~‘15.01.31	‘14.05.15~’15.01.31	(191)
917	㈜선진E/G외2	4,768	648 (7차)	‘07.12.31 ~‘15.01.31	‘14.05.01 ~‘15.01.31	(166)

□ 추진현황

○ ’07. 12 : 책임감리용역 계약 및 착수

○ ’08. 08 : 책임감리용역 실착수

○ ‘13. 05.15 : 총사업비 조정결과 통보(국토교통부→서울시)

○ ‘13. 12 : 지하철 9호선 2단계 공사기간 연기

○ ’15. 01 : 각 공구별 차수 감리용역 진행중(7차)

Ⅱ		보고내용

○ 감리용역기간 변경

- 지하철9호선 2단계 구간을 ‘15.03월말 개통예정으로 현재 시설공사 마무리 공사 추진중이며,

- 개통 및 마무리공사를 원활히 추진코자 개통후 1개월까지 감리용역 준공기한을 연기코자 하며, 이에 따라 투입된 감리원의 등급을 하향조정하여 추가비용이 최소화 될 수 있도록 조정하여 ‘15년도 예산범위 내에서 공구별로 계약금액을 조정코자 함.

- 공구별 감리용역 기간 변경계획

공구	계약업체	당 초		변 경		비고
		총 괄	차 수	총 괄	차 수
916	㈜유신 외4	‘07.12.31 ~‘15.01.31	‘14.05.15~’15.01.31	‘07.12.31 ~‘15.04.30	‘14.05.15~’15.04.30	3개월 (7차)
917	㈜선진E/G외2	‘07.12.31 ~‘15.01.31	‘14.05.01 ~‘15.01.31	‘07.12.31 ~‘15.04.30	‘14.05.01 ~‘15.04.30	“

○ 투입감리원 등급조정 계획

- 투입인원 등급조정 방법

․ 916공구 감리원 등급조정 계획                             (단위 : 인)

구 분 (7차분)		계	‘14년								‘15년
			5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
토목(수석,감리사, 감리사보)	당초	24	3	3	3	3	3	3	2	2	2	-	-	-
	변경	29	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1
안전(감리사보)	당초	8	1	1	1	1	1	1	1	1
	변경	8	1	1	1	1	1	1	1	1
건축,기계,전기	당초	40	5	4	5	5	5	4	5	4	3	-	-	-
	변경	51	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	3	3

(토목분야)

- ‘15.1월부터 3개월간 2인(감리사보 2인)으로 운영

- ‘15.4월부터 1개월간 1인(감리사보 1인)으로 운영

(건축분야)

- ‘15.1월부터 2개월간 2인(감리사보 2인)으로 운영

- ‘15.3월부터 2개월간 1인(감리사보 1인)으로 운영

(기  계)

- ‘15.1월부터 4개월간 1인(감리사보 1인)으로 운영

(전기분야)

- ‘15.1월부터 4개월간 보조감리원 등급을 조정하여 1인(고급→중급)으로 운영

․ 917공구 분야별 감리원 등급조정 계획                        (단위 : 인)

구 분 (7차분)		계	‘14년								‘15년
			5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
토목(수석,감리사, 감리사보)	당초	23	3	3	3	3	3	2	2	2	2	-	-	-
	변경	29	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
건축,기계,전기	당초	29	4	4	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-
	변경	39	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

(토목분야)

- ‘15.2월부터 3개월간 책임감리원 등급을 조정하여 2인(단장: 감리사→감리사보 1인, 감리사보 1인)으로 운영

(건축분야)

- ‘15.2월부터 3개월간 1인(감리사보 1인)으로 운영

(기  계)

- ‘15.2월부터 3개월간 보조감리원 등급을 조정하여 1인(감리사→감리사보)으로 운영

(전기분야)

- ‘15.2월부터 3개월간 보조감리원 등급을 조정하여 1인(고급→중급)으로 운영

○ 감리용역비 조정

- 감리원 투입조정에 따른 용역비 변경                     (단위 : 백만원)

공구명		투입인원(인.월) [상주감리원]			계 약 금 액			비고
		당 초	변 경	증,감	당 초	변 경	증, 감
916	총 괄	391.78	407.32	증)15.54	4,816	5,007	증)191
	7 차	60.84	76.38	증)15.54	743	934	증)191
917	총 괄	343.52	355.45	증)11.93	4,768	4,934	증)166
	7 차	47.15	59.08	증)11.93	648	814	증)166

Ⅲ		조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 916,917공구 책임감리용역의 총괄 및 7차분에 대한 감리용역 기간을 9호선2단계 개통시기에 맞추어 준공기한을 연기조치하고

○ 준공기한 연기에 따라 증액되는 추가비용을 최소화하기 위하여 투입된 감리원의 등급을 하향조정하여 ‘15년 예산범위내에서 계약금액을 증 조정(357백만원)코자함.

- 916공구 : 191백만원

- 917공구 : 166백만원

첨부  각 공구별(916~917공구) 감리원 변경투입계획 각  1부. 끝.