문서번호	도로관리과-1277
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로안전시설팀장	도로관리과장
박성록	김순수	01/27 이택근

‘15년도 방음시설설치 및 보수보강사업  -

- 예산 배정계획 -

2015. 1.

도시안전본부

(도로관리과)

15년도 방음시설 설치 및 보수보강사업

예산 배정계획

시도변의 정온한 환경을 요하는 학교, 주거지역에 설치된 방음시설이 경과년수가 오래되어 노후, 도로소음 기준치 초과 등으로 안전사고 위험 및 도시경관을 저해하고 있으므로 개량(설치)하여 쾌적한 주거 및 도로환경을 개선하고자 함.

Ⅰ. ‘15년도 방음벽 시설 정비사업 추진계획

○ 사업기간 : ‘15. 1. ~ ’15.12

○ 총사업비 : 2,874백만원

○ 세부내역                                              단위:백만원

연번	기관별	사업비	위 치	사업내용	비고
	9개기관	2,874	10개소	H=3.6~6.0m,L=1,325m
1	중 구	125	남산1호터널입구	개량H=4m,L=44m (높이조정)	흡음→투명형
2	성북구	270	남대문중학교 주변	개량H=6m,L=88m	흡음→투명형
3	영등포구	478	여의도중학교 주변	개량H=4m,L=260m	흡음→투명형
4	노원구	171	노원고교 주변	개량H=3.5m,L=106m	흡음→투명형
5	송파구	382	문정초교 주변	개량H=5.5m,L=151m	흡음→투명형
6		140	올림픽대교남단(세무서)	신설H=6.0m,L=30m
7	서초구	734	세화고등학교 주변	개량H=6.0m,L=306m	흡음→투명형
8	강남구	15	압구정고교주변	교체72㎡	파손부교체
9	강동구	15	강일중교주변	교체76㎡	파손부교체
10	서부도로	499	용산구반포로한신아파트	개량H=3.0m,L=340m (높이조정)	흡음→투명형
11	도로관리과	45			포괄비

Ⅱ. 사업예산 재배정 계획

(단위:백만원)

기관별	예산액	배정액 (금회)	배정잔액	위 치	비고
9개기관	2,874	1,515	1,359	10개소
중 구	125	-	125	남산1호터널입구	사업계획미보고 추후배정
성북구	270	270	-	남대문중학교 주변	공사비 재배정
영등포구	478	22	456	여의도중학교 주변	기술용역완료후 공사비 재배정
노원구	171	-	171	노원고교 주변	사업계획미보고 추후배정
송파구	382	380	2	문정초교 주변	공사비 재배정
	140	140	-	올림픽대교남단(세무서)
서초구	734	646	88	세화고등학교 주변	공사비 재배정
강남구	15	15	-	압구정고교주변	공사비 재배정
강동구	15	15	-	강일중교주변	공사비 재배정
서부도로	499	27	472	용산구반포로한신아파트	기술용역완료후 공사비 재배정
도로관리과	45	-	45		포괄비

【예산과목】 부서 : 도시안전본부 도로관리과,  분야: 도로,  정책 : 도로시설물관리, 단위 : 도로 및               도로부속물관리, 세부 : 방음시설 설치 및 보수보강

Ⅲ. 추진일정

○ ‘15. 1. : 기관별 예산 재배정

○ ‘15. 2. : 현장조사 및 공사(용역)발주

○ ‘15. 3. : 공사착공 및 시행

○ ‘15. 12 : 공사완료

따로붙임 : 사업설명서(예산편성요구서) 1부   끝.