투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	유입분배조 통합반류수 유량계 바이패스 배관 및 유량계실 정비 공사 계약 변경 시행

2014년 12월 23일 계약되어 구매설치예정인 『통합반류수 유량계 바이패스 배관 및 유량계실 정비 공사』건에 대해 계약변경을 하고자 합니다.

가. 건    명 : 통합반류수 유량계 바이패스 배관 및 유량계실 정비 공사

나. 계약금액 : 25,847,760원(이천오백팔십사만칠천칠백육십원)

다. 계 약 자 : 에이치지산업개발(주) 대표 김선태

구분	변경전	변경후	비고
준공기한 연장	2015.01.27	2015.2.28

라. 변경내용

마. 변경사유 : 통합반류수 유량계 바이패스 배관 및 유량계실 정비공

사의 경우 당초 설계가 전문지식없이 토압을 견디기 힘든 구조로

설계되어 검토후 설계변경이 사료되며, 그에 앞서 공사기한 연장이

필요함

붙임문서  1. 계약변경방침서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	김지영		물재생과장	김일운		난지물재생센터소장	01/27 가길현
협조자	주무관	이호복
시행	물재생과-282	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개