투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰 (곰사 뒷방사장 보수공사)

1. 시설과-467호(2015.1.27)와 관련입니다.

2. 곰사 뒷방사장 보수공사에 대하여 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 곰사 뒷방사장 보수공사

- 계 약 자 : ㈜미래이앤씨 대표 이용호

가. 준공기한 연기

공사기간	변 경 전	변 경 후	비 고
	2014.9.11.~2015.1.28	2014.9.11.~2015.2.12	15일 연장

나. 연기사유

- 겨울철 기온강하로 도장 등 공사 중단 및 출입문 추가설치 등 신규공종 시행

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 곰사 뒷방사장 보수공사 준공기한 연기보고서 및 합의각서 각1부.  끝.

	서울대공원장
주무관	김용주		추진반장	01/27 유인행
협조자
시행	시설과-471	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02) 500-7054	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개