투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	지하철9호선2단계 책임감리용역 준공기한 연기 (916,917공구)

1. 우리본부에서 시행중 인 『지하철9호선2단계 건설공사 전면책임감리용역(916, 917공구)』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명

가. 용 역 명

1) 서울지하철9호선2단계 916공구 건설공사 전면책임감리용역

2) 서울지하철9호선2단계 917공구 건설공사 전면책임감리용역

나. 계약 및 준공기한 연기의뢰 현황

(단위 : 백만원)

공 구	도 급 자		계약금액		감리용역 기간		비고
			총 괄	진행중인 차 수	총 괄	진행중인 차 수
916	㈜유신 외 4	당초	4,816	743 (7차)	‘07.12.31 ~‘15.01.31	‘14.05.15~’15.01.31
		변경	변경없음	변경없음	‘07.12.31 ~‘15.04.30	‘14.05.15~’15.04.30
917	㈜선진E/G외2	당초	4,768	648 (7차)	‘07.12.31 ~‘15.01.31	‘14.05.01 ~‘15.01.31
		변경	변경없음	변경없음	‘07.12.31 ~‘15.04.30	‘14.05.01 ~‘15.04.30

다. 준공기한 연기사유

- 지하철9호선 2단계 구간을 ‘15.3.28일 개통예정으로

- 개통 및 마무리공사를 원활히 추진코자 개통후 1개월까지(‘15.04.30) 준공기한 연기

첨부 : 1) 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3) 합의각서(볃도첨부) 각1부. 끝

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이경훈		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	01/28 한동근
협조자	주무관	황왕연		기획예산과장	최갑영		계약2팀장	홍연화
시행	도시철도토목부-1100	(		)	접수		(		)
우	100-170	서울 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7223	/전송	02-772-7306	/	lkh00n@seoul.go.kr	/	대시민공개