문서번호	급수운영과-2233
결재일자	2015.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
홍순재		양윤선	01/28 최명익
협조

상수도 GIS 추진현황 및 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도GIS 추진 현황 및 계획

상수도 GIS 데이터의 체계적인 수정 ․ 보완으로 상수도 업무 수행에 따른 정확한 정보를 제공하고 업무의 과학화 및 효율성 제고

□ ‘14년 추진 현황

○ 추진 개요

- 각종 상수도공사 및 현장조사 결과 확인된 자료를  GIS에 반영하여 관리함.

- 지하에 매설된 상수도시설물의 GIS 정확도를 높이기 위하여 측량 용역업체에

의한 『상수도GIS DB 정확도개선사업』 추진

· 용역 업체명 : 새한항업(주)외 2개사 (범아엔지니어링)

· 추진 기간 : 2014.04.01 ~ 2015.03.30

· 추진 대상 : 신설 상수도 시설물 측량 (D=50mm이상, L=10m이상)

기존 상수도 시설물 탐사 및 측량 (D=80mm~600mm)

○ 추진 실적

2014년도 상수도 GIS 속성 수정 실적                     (‘14.12.31기준)

구 분	계	관로	밸브류	소화전	수도계량기	기타
목 표	11,250	7,500	2,500	300	900	50
추진실적(건)	12,095	7,989	2,752	296	1,038	20
추 진 율	107.5%	106.5%	110.1%	98.7%	115.3%	40%

-  2014년도 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 추진실적 : 90.5km

· 신설 상수도 시설물 측량 : 15.3km

· 기존 상수도 시설물 탐사 및 측량 : 74.6km

D=300mm~600mm(동대문지역) : 21.6km, [300mm이상 구축 완료]

D=50mm~250mm(아차산1~14,01-01블록) : 53km (‘14.12.31기준)

구 분	계	신설관(km)				기존관(km)
		연간단가 공사	배급수관 정비공사	송배수관 정비공사	원인자 이설공사	기존 상수도 시설물
목 표	87.7	3.0	6.0	3.7	2.0	73
실 적	89.9	3.4	6.0	3.7	2.2	74.6
추진율	102.5%	113.3%	100%	100%	110%	102.1%

□ ‘15년 추진 목표 및 계획

○ 추진 목표

- 2015년도 GIS DB 정확도개선사업

· 사업기간 : 2015년 04월 01일~2016년 03월 31일

· 사업자명 : 2015년 3월 중 정확도개선사업자 선정 예정

· 목표예정물량 : 88km (신설관로 : 16km, 기존관로 : 72km)

구분	계	연간단가 공 사	배급수관 정비공사	송배수관 정비공사	원인자 이설공사	비고
신설관로 목표(km)	16	2.9	6.5	2.6	4

[신설관로 목표 물량]

공사종류	공사명	구경	연장(km)
	총 계		16
송배수관 정비공사	소 계		2.67
	아차산로 배수관부설공사	500	0.64
	고산자교주변 송배수관정비공사	900	0.29
	용두역 주변 송배수관정비공사	900	0.24
	배봉초교사거리~중랑교간 송배수관정비공사	500	0.8
	동일로 송배수관정비공사	1000	0.7
배급수관 정비공사	소계		6.47
	자양동796번지외 1개소 배급수관정비공사	150	1.21
	용답동226번지외 1개소 배급수관정비공사	150	1.8
	장안동369번지외 1개소 배급수관정비공사	200~300	1.85
	용두동39번지외 1개소 배급수관정비공사	200~300	1.61
연간단가 공사	관내 연간단가 상수도공사	20~300	2.9
원인자이설 공사	소 계		4
	2014년도 정확도개선사업 이월물량	80~1000	2
	2015년도 원인자 이설공사 예상물량	80이상	2

[기존관로 목표 물량]

50mm~250mm 배수관 유수율이 낮은 중블럭 순서로 소블록별 본부 선정

- 상수도 시설물 GIS DB 정비 목표 : 13,900건

구분	계	상수관로	밸브류	소화전	수도 계량기	기타	비고
GIS DB 정비 목표	12,650	8,000	3,000	300	1,300	50

○ 중점 추진계획

- 상수도 GIS DB를 위한 상수도 공사 준공 시설자료 접수 및 GIS 입력

· 상수도공사 준공 시설자료 기한내 접수 및 GIS 공사관리 입력 관리

· 상수도공사 준공 시설자료에 의한 GIS DB 입력

- 정확도 개선사업을 위한 측량의뢰 및 작업지시 관리 및 GIS DB검수

· 공사시 관로 노출상태에서 GIS 측량이 이루어지도록 공사 착공전

측량의뢰 담당자 협조가 필요함.

· 2014년도 정확도개선사업자는 측량지시 한 것 중 미준공된 건은 2015년도

사업자에게 현장조사 자료를 이월 예정임. (이월 예정 물량 : 2.01km)

이월 물량	공사명	구경	연장	착공일	준공일
재개발지역	왕십리뉴타운1구역 상수도이설공사	300~400	0.63	2014/11/06	2015/03/15
재개발지역	옥수13구역 상수도이설공사	100~300	1.03	2014/11/21	2015/12/25
원인자이설	중랑천 횡단 상수도관 이설공사	1350	0.13	2014/11/05	2015/07/04
원인자이설	삼룡사앞 도로개설구간 상수도 이설공사	80	0.06	2014/12/26	2015/04/15
연간단가	2014년 묵1동외 7개동 상수도공사	100	0.16	2014/12/30	2015/01/31

- GIS 측량 현장조사(샘플검수) 및 GIS 상이 시설물 현장 조사후 GIS 반영

· 준공검사전 GIS현장조사서 측량 샘플검수 시행 및 GIS담당자 확인

· GIS 상이 시설물에 대한 수정 요청건은 확인 후 GIS 속성 수정

- GIS 자체교육 분기별 실시 및 보안교육 상·하반기 실시 예정

· GIS프로그램 활용 교육 및 업무의 효율성 제고

· 1사분기 GIS 자체교육 및 상반기 보안교육은 GIS운영실적 평가 후

실시 예정