문서번호	공원조성과-1144
결재일자	2015.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	남산복원팀장	공원조성과장		푸른도시국장
김원선	정일환	오순환		01/28 오해영
협 조
	공원녹지정책과장		최윤종
	서부공원녹지사업소장		안해칠

2015 갈현공원내 도시농업체험원 조성사업 추진계획

2015. 1.

푸른도시국

(공원조성과)

: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	서울시 도시공원조례	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(	서부공원녹지사업소, 은평구청	)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 갈현공원내 도시농업체험원 조성사업 추진계획

갈현근린공원 확대부지에 추진하고 있는 교육과 치유를 겸한(에듀팜+힐링가든)도시농업체험원 조성사업에 대한 2015년 세부 추진계획을 수립 시행하여 도시민의 정서 함양에 기여하고자 함.

1		사업개요

□  위    치 : 은평구 불광동 458-1 일대

□  면    적 : 24,615㎡(1단계 15,694㎡, 2단계8,921㎡)

□  사업기간  : '12. 01.~'15. 6.('09.04 ~ '11.12, 국궁장 추진, 5,800백만원)

□  총사업비 : 8,185백만원('12년 ~ '13년 : 6,744, '14년 1,140 '15년 301)

□  사업내용 : 체험장(텃밭), 습지원, 관리사무소, 생태화장실, 퇴비장 등

2		추진근거

□ 시장 공약사업 : 도시농업과 커뮤니티가든 활성화(4-3-4)

□ 시장 지시사항 (갈현도시농업공원 종합적 추진, 2012.03.08)

□ 남산르네상스사업 조정계획(행정2부시장 방침 제148호, 2012.05.09)

□『갈현근린공원 확대부지 내』농촌체험형공원(가칭)조성계획 방침(2012.05.24)

3		추진경위

□ 국궁장 → 도시농업체험원으로 변경절차 이행

- '12.05.09 : 남산르네상스사업 조정계획(행정2부시장 방침 제148호)

□ 석호정이전부지 → 도시농업체험원으로 변경 근거

- '12.05.24 : 농촌체험형공원(가칭)조성계획 방침('12.05.24)

- '12.06.19 ~ 09.07 : 갈현농촌체험형공원 추진위원회(구성) 개최 및 논의(6회)

- '12.08.01 ~ : 텃밭분양운영(1단계부지)

- '12.09.27 : 도시공원위원회 및 투자심사 재심의(결과:조건부가결)

- '12.11.01 : 도시계획시설(공원) 실시계획변경인가

- '13.06.18 : 제5차 도시공원위원회 심의(조건부 가결)

- '13.08.01 : 갈현근린공원 조성계획결정(변경) 및 지형도면 고시

- '14.01.02 : 도시계획시설(갈현근린공원)사업 실시계획(변경)인가 고시

4		2015년 추진계획

□ 갈현 도시농업체험원 조성공사(추가공사 등) : 서부공원녹지사업소

- 위     치 : 은평구 불광동 458-2번지 일대

- 규     모 : 24,615㎡

- 기    간 : ‘15. 1 ～ ‘15. 6

- 사 업 비 : 301백만원

- 사업내용 : 식생매트, 다목적용도의 야외모임장소, 평의자 등

- 추진일정

□ ‘15. 1~ 2   : 공사발주

□ ‘15. 3~ 6  : 공사시행 및 준공

□ 텃밭분양 및 운영 : 은평구

- 구    좌 : 300구좌 예상

- 분양시기 : ‘15. 3 ~4월

※ 요구사항 : 관리예산이 확보되지 않아 시설물 인수시 어려움이 있어 운영관리비 확보요청

□ 처리계획 : 공원조성과-2869(‘13.3.12.),2900(’13.3.13.)호로 공원녹지 정책과와 협의 완료한 사항으로 시공원유지관리비에서 일부 지원

5		행정사항

□ 개장식 : 2015년 5월 예정

□ 인수인계(‘15.6월 예정) : 서부공원녹지사업소 → 은평구

□ 공원조성 후 관리 : 은평구(서울시 도시공원조례 제31조)

※공원조성과-2869호(2013.3.12.)방침:은평구에 위임 관리 기통보

붙임  1. 갈현근린공원 위치도 1부.

2. 현황사진 및 마스터플랜 1부.

3. 2014년 갈현 도시농업체험원 조성공사 사진 1부.

4. 추진 실적 1부. 끝.