문서번호	도시철도계획부-755
결재일자	2015.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공정관리과장	도시철도계획부장	도시철도국장
이덕배	이윤권	박상돈	01/28 김준기
협 조

- 우이~신설 경전철 민간투자사업 -

통합 공정회의 개최 결과 보고

2015. 01.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『우이~신설 경전철 민간투자사업』

통합 공정회의 개최 결과 보고

우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업의 효율적인 관리와 원할한 사업추진을 위하여 월간 통합 공정회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : 2015. 1. 27(화) 14:00

○ 장    소 : 도시철도국 10층 공용회의실

○ 참 석 자

- 발  주  처 : 도시철도국장, 도시철도사업부장, 도시철도설비부장,

분야별 담당과장 및 업무담당

- 사업시행자 : 법인대표자, 건설사업단장

- 현장관리자 : 각 공구 현장대리인 및 책임감리원, 궤도 및 시스템

분야 책임감리원

□ 회의결과

○ 주요 회의내용

- 분야별 부진공정 만회대책 등 공정보고

- 공정 및 사업관리와 관련한 분야별 협조사항 등

- 사업추진에 따른 문제점 및 향후대책 등

○ 분야별 공정관리 보고(회의자료에 의함)

- 사업추진 총괄 보고 : 건설사업단장

- 각 분야별 공정보고 : 분야별 책임감리원

○ 국장 지시사항

- 부진공정 만회대책이 전반적으로 미흡함.

· 돌관작업, 인원, 자재, 장비 추가 투입 등 일반적인 공정만회대책은      당연히 추진할 사하이며, 추가적인 공기단축방안을 수립할 것.

· 분야별, 공구별, 정거장, 기능실 등 세부공정의 공기단축방안 필요

· 전체 계획공정 내 실행 가능한 공기단축 방안을 마련할 것.

- 분야별, 관계자 등 상호 협의한 부진공정 만회대책을 제시할 것.

· 전 분야 만회대책 공정표(마스터스케줄) 작성

· 각 분야별 협조가 필요한 사항은 사전 협의하여 가능한 대책을 제시할 것.

- 현재 운행하고 있는 경전철 건설사업의 사례도 조사하여 참고할 것.

- 미흡한 부진공정 만회대책은 2주 후(‘15. 2. 10)에 다시 보고 바람.

○ 발주처 주요의견

- 공기연장(2016.11.30.)된 공정에 맞춘 대책이 필요함.

- 후속공정이 가능한 공정을 먼저 선행하여 작업공간 확보 및 인계 필요.

- 시운전은 1,2공구에서 먼저 시행하도록 특단의 대책 필요

- 궤도 및 전차선 시공기간(11개월)을 단축하면 만회할 수 있을 것임.

· 터널 및 변전소 등을 신속히 인계할 필요가 있으며,

· 11개월의 시공기간을 단축하는 방안을 모색할 필요가 있음.

□ 향후계획

○ 금회 회의결과 미흡한 부진공정 만회대책 및 지시사항은 다음 공정회의 시 보완하여 보고

○ 다음 공정회의 개최 : ‘15. 2. 10. 15:00(일정은 다소 변경될 수 있음)

붙임 : 회의자료 및 공정회의 사진 각 1부.  끝.