문서번호	도시철도사업부-753
결재일자	2015.1.28.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	경전철1과장	도시철도사업부장
정영호	박동룡	01/28 이은상
협 조
	주무관		위성환

- 우이∼신설 4공구 전면책임감리용역 -

물가변동 및 투입계획 변경으로 인한 계약금액 조정 검토

2015. 01

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

- 우이∼신설 4공구 전면책임감리용역 -

물가변동 및 투입계획 변경으로 인한 계약금액 조정 검토

우이∼신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(4공구) 계약자인 ㈜도화엔지니어링외 3개사로부터 물가변동 및 투입계획 변경 등으로 인한 계약금액 조정요청에 따른 검토 보고임.

Ⅰ				용 역 개 요

◦ 용 역 명 : 서울시 우이~신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)

◦ 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링 외 3개사

◦ 계약현황

(단위:천원, 부가세포함)
구분	계약일	계약기간	계약금액	비 고
총괄	2008. 12. 31	2009. 01. 09 ~ 2017. 01. 31	4,493,900
1차	2008. 12. 31	2009. 01. 09 ~ 2009. 11. 30	107,000	준 공
2차	2009. 11. 30	2009. 12. 01 ~ 2011. 02. 18	572,000	준 공
3차	2011. 02. 17	2011. 02. 19 ~ 2012. 02. 12	629,900	준 공
4차	2012. 02. 07	2012. 02. 13 ~ 2013. 03. 20	726,500	준 공
5차	2013. 03. 21	2013. 03. 21 ~ 2014. 10. 30	895,000	준 공
6차	2014. 09. 17	2014. 10. 31 ~ 2015. 06. 07	447,000	진행중
잔여		2015. 06. 08 ~ 2017. 01. 31	1,116,500

Ⅱ				검 토 내 용

◦ 물가 변동으로 인한 계약금액 조정

- 관련 근거

․ 입찰안내서 「기술용역계약 특수조건」 제9조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

․ 우이-신설 도시철도 민간투자사업 감리물가변동 기준(도철공무부-10244, 2010.11.30)

- 조정방법 : 소비자물가지수 변동율 적용

- 조정요청일 : 2015. 01. 27 [도화(감리) 2015-1764]

- 조정시점

․ 기준시점 : 2008. 11. 30 (입찰일 기준 : 2008. 12. 24)

☞ 소비자물가지수 : 95.356

․ 비교시점 : 2014. 12. 31 (감리용역 실투입공정률 해당 계획공정 환산 시점의 직전 분기말)

☞ 소비자물가지수 : 108.820

※ 조정시점 산출

산 출 기 준		총 괄	6 차	비 고
공정률 (2015.01.31 기준)	계 획	66.00% (229.2인.월)	30.30% (10.8인.월)
	실투입	66.00% (229.2인.월)	30.30% (10.8인.월)
비교시점	실공정	2015. 01. 31	2015. 01. 31
	물가지수 적용	2014년 12월	2014년 12월	직전 분기말

- 소비자물가지수 변동율 : 14.11%

․ 기준시점(2008. 11. 30) 소비자물가지수 : 95.356

․ 비교시점(2014. 12. 31) 소비자물가지수 : 108.820

※ 소비자물가지수 변동율 산출

소비자물가지수 변동율 =	(비교시점 소비자물가지수 – 기준시점 소비자물가지수)	× 100
	기준시점 소비자물가지수

=	(108.820 – 95.356)	× 100	= 14.11%
	95.356

- E/S 적용 현황

(단위:원, 부가세 별도)
구 분	변경전 공급가액					조정율	조정금액	비고
	공급가액	제외 금액			E/S적용금액
		기시행 (준공분)	기타	소계
총괄	2,519,958,183	2,400,875,999	-	2,400,875,999	119,082,183	14.11%	16,000,000
6차	119,082,183	-	-	119,082,183	119,082,183	14.11%	16,000,000

◦ 감리원 투입계획 조정 현황

구분		총괄 용역		6차 용역		비고
		당 초	변 경	당 초	변 경
계		347.497 인․월	변경없음	37.164 인․월	35.686 인․월
토목	수석감리사	′09.08.10 ~ ′13.01.15	변경없음	-	-
	감리사	′10.05.01 ~ ′17.01.31	변경없음	′14.10.31 ~ ′15.06.07	′14.10.31 ~ ′15.06.01	총괄
	감리사보	′09.08.10 ~ ′16.12.31	변경없음	′14.10.31 ~ ′15.06.07	′14.10.31 ~ ′15.06.01	토목
	감리사보	′11.06.01 ~ ′15.07.31	변경없음	′14.10.31 ~ ′15.06.07	′14.10.31 ~ ′15.06.01	토목
	감리사보	′13.12.16 ~ ′14.09.24	변경없음	-	-	안전 (추가배치)
	검측감리원	′14.10.01 ~ ′16.12.31	변경없음	′14.10.31 ~ ′15.06.07	′14.10.31 ~ ′15.06.01	지중 (추가배치)
건축	감리사	′15.03.01 ~ ′16.04.15	변경없음	′15.03.01 ~ ′15.06.07	′15.03.01 ~ ′15.06.01
기계	감리사	′15.03.01 ~ ′16.04.15	변경없음	′15.03.01 ~ ′15.06.07	′15.03.01 ~ ′15.06.01
소방	감리사보	′15.05.01 ~ ′16.01.15	변경없음	′15.05.01 ~ ′15.06.07	′15.05.01 ~ ′15.06.01
전기	고급	′15.03.01 ~ ′16.04.15	변경없음	′15.03.01 ~ ′15.06.07	′15.03.01 ~ ′15.06.01

◦ 감리원 투입계획 및 물가변동 계약금액 조정

(단위 : 천원, 부가세 포함)
구 분	계약금액	조정금액	투입계획 조정	실 조정액	변경계약 금액
총괄분	4,493,900	17,600	-	17,600	4,511,500
6차분	447,000	17,600	-17,600	-	447,000

Ⅲ				조 치 계 획

◦ 공정지연에 따른 예정 공정계획과의 균형을 고려하고 용역기간동안 효율적인 과업수행을 위해 상기 검토내용과 같이 총괄 및 6차 용역계약을 변경코자 함

◦ 책임감리용역 조정 내용

구분	당초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총괄	′09.01.09~ ′17.01.31	4,493,900	′09.01.09~ ′17.01.31	4,511,500	∘계약기간 : 변경없음 ∘계약금액 : 증) 17,600천원 ∘사유 - 물가변동 (증 17,600천원)
6차	′14.10.31~ ′15.06.07	447,000	′14.10.31~ ′15.06.01	447,000	∘계약기간 : 감) 6일 ∘계약금액 : 변경없음 ∘사유 - 물가변동 반영 (증 17,600천원) - 투입계획 조정 (감 17,600천원)

붙  임 : 1. 감리단 공문(관련 서류) 1부

2. 변경 설계내역서 각 1부

3. 우이-신설 감리 물가변동 관련 방침서 사본 1부

4. 품목별 소비자물가지수 자료 1부.  끝.