문서번호	시설과-535
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
이상국	공헌구	심상원	01/29 안영노
협 조
	총무과장		이경로

제3AF관 관람대안전난간설치공사 실정 검토 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

제3AF관 관람대안전난간시설 개량공사』

실정 검토 보고서

『제3AF관 관람대안전난간시설 개량공사』시행 중 시공자가 제출한 실정사항에 대하여 아래와 같이 검토 보고합니다.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 제3AF관 관람대안전난간시설 개량공사

□ 공사기간 : 2014. 12. 03 ~ 2015. 01. 31

□ 시 공 자 : ㈜위브건설 대표 정 진 배

□ 도 급 비 : 64,709,980원

□ 주요 공사내용

○ 기존 스테인레스관람대난간(일반계단형 난간 H=1.2m) 철거

○ 접합유리(규격:1.6mX1.5m )설치 및 평철프레임 설치

○ 지지기둥인 H빔(100X100X6/8)설치후 에폭시 페인트2회 도장

○ 기존옹벽에 안전난간 설치를 위한 앙카플레이트 설치

○ 적삼목 설치를 위한 스테인레스파이프(ㅁ-40X40X2T)설치

○ 적삼목설치(H=0.75m) 및 기타부대시설공사 등

2		준공기한 연기사유

□ 기상악화로 인한 공사기한 연기

○ 제3AF관 관람대안전난간시설개량공사는 시공특성상 용접작업이 주

공정이며, 용접작업시 강우나 강설이 있을경우에는 작업의 위험성이

높아 공사가 불가하여 첨부한 기상청 날씨 정보에 나와있는 것 같이

시공불가능한 15일간에 대하여 공사기한 연기신청

□ 공사기간 연장

○ 기상악화가 계속발생됨에 따라 공사기간 부족할것으로 판단되므로 공사기간을 연장하는 것이 타당하다고 사료됨

사 업 명	변 경 전	변 경 후	비 고
제3AF관 관람대안전 난간시설개량공사	‘14. 12. 03 ~ ’15. 01. 31	‘14. 12. 03 ~ ’15. 02. 15	15일간

3		예 산 현 황

□ 사업비 변경

(단위 : 원)

사 업 명	금 액	계약금액	제1차 실정보고	비 고
제3AF관 관람대안전 난간시설개량공사	도 급 금 액	64,709,980	64,709,980	변동없음
	이 전 비	-	-
	총 공사비	64,709,980	64,709,980	변동없음

□ 예산과목

○ 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 시설비

4		조 치 의 견

□ 위 변경내용을 시공자에게 우선 통보하여 계속 시공토록 조치하고, 추후 정산하고자 함. 끝.