문서번호	급수설비과-666
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
홍원기	김기상	이규상	01/29 고인석

시민이 즐겨마시는 건강하고 맛있는 물 세계속의 아리수

2015년 수도계량기보호통

보온재 정비계획 보고

2015.  1.

상수도사업본부

[급수설비과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

’15년 수도계량기보호통 보온재 정비계획

수도계량기보호통 전수조사 결과 보온재가 파손, 망실 되거나 몸체의 변형으로 보온재(스티로폼)의 교체가 불가한 보호통에 대하여 PE재질의 보온재로 대체 설치하여 동파를 최소화 하고자 2015년 정비계획을 보고드림

Ⅰ		사 업 현 황

▢ 설치근거

○ 행정2부시장 방침 제77호 (2013. 03.13) “ 겨울철 대비 동파·동결 예방대책 추진”

○ 차장방침 제137호(2007.3.29.) “시민 불편해소를 위한 보호통 뚜껑 및 보온재 제공”

▢ 총사업개요

○ 수도계량기보호통 전수조사 : ’13년 3 ~ 5월 ○ 사업기간 : 2013～2017년 ○ 보온재 정비대상 : 114,071개 ○ 사업비 : 39억

Ⅱ		보온재 정비추진 계획

▢ 연도별 추진 계획

○ 추진기간 : 2013 ～ 2017년

○ 정비대상 : 114,071개

○ 사업비 : 39억

○ 연도별 추진계획

	계	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
소요예산	39억	5억	9억	10억	10억	5억
정비대상 (개)	114,071	17,176	30,800	32,000	24,317	9,778
15㎜	64,122	16,934	26,828	15,706	4,654	-
20㎜	23,359	164	3,906	10,228	9,061	-
25㎜	14,377	63	35	4,958	9,321	-
30㎜	5,415	11	15	1,108	1,281	3,000
40㎜	5,233	2	13	-	-	5,218
50㎜	1,565	2	3	-	-	1,560

※ 보호통전수조사 결과를 바탕으로 상대적으로 동파에 취약한 13㎜부터 순차적으로 정비

- 최근 3년간 구경별 동파 비율

계	15㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜
100 %	72.3	16.6	7	2.2	1.7	0.2

▢ 2014년 추진 실적

○ 목표량 : 30,800개

○ 사업비 : 9억

○ 실   적 : 30,800개 (100%)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표	30,800	1,317	5,652	6,500	3,537	1,280	5,500	2,668	4,346
설치실적	30,800	1,355	5,652	6,462	3,537	1,280	5,500	2,668	4,346
비율(%)	100.0	102.9	100.0	99.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

▢ 2015년 세부추진 계획

○ 추진기간 : 2015. 1 ～ 11월

○ 목표량 : 32,000개

○ 사업비 : 10억

○ 사업소별 추진계획

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
설치 (개)	계	32,000	848	2,797	10,000	2,692	986	7,188	3,011	4,478
	15㎜	15,706	389		10,000		300	4,942	75
	20㎜	10,228		1,843		1,661		2,246		4,478
	25㎜	4,958	343	954		1,031	498		2,132
	32㎜	1,108	116				188		804
배정예산 (백만원)		1,000	35	100	265	90	40	210	110	150

Ⅲ		조 치 계 획

▢ 2015년 조치계획

○ 보온재 정비대상 중 동파 우려가 많은 15㎜를 먼저 정비토록 하고, 반드시 일체형 PE보온재로 정비

○ 연차별 추진계획상의 ’15년 정비대상목록을 우선 정비

구 경	총교체비용	시공비(운반+설치비)	자재비
15㎜	28,100	14,600	13,500
20㎜	33,600		19,000
25㎜	33,600		19,000
32㎜	44,400		29,800

Ⅴ		행 정 사 항

▢ 수도계량기보호통 보온재 교체 시행

○ 수도사업소로 보온재 교체관련 예산을 일괄 재 배정

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비 32204)

○ 사업소 실정에 맞게 정비 계획 및 자재구매 방법 등을 수립하여 정비실시

○ 사업소와 계약된 급수공사 업체에 작업지시 후 정산시행

○ 동절기 이전 정비 완료하여 동결/동파 예방 : 11월 까지 완료

○ 매월 5일 보온재 정비 실적을 급수운영과에서 수합하여 제출. 끝.