투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	폐기물처리용역(4차) 준공기한 연기요청 [지하철918공구]

1. 우리본부에서 시행중인 『서울지하철 9호선 918공구 건설공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울지하철 9호선 918공구 건설공사 건설폐기물 처리용역

나. 계 약 자 : 삼환환경(주)  대표 강재성

다. 용역개요 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 폐기물 처리

라. 용역기간 : 2014.02.05 ~ 2015.01.31

마. 예산과목 : 도시기반시설 본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 시설비

바. 준공기한 연기내용

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
4차	계약금액	150,000,000	150,000,000	내역변경 없음
	기 간	’14.02.05~’15.01.31	’14.02.05~’15.03.31	연 기

마. 연기사유 : 서울지하철 9호선3단계 918공구 건설공사의 건설폐기물 발생시기 미도래(폐아스콘 621ton)

붙 임 : 1) 준공기한 연기 검토보고 1부.

2) 준공기한 연기 의뢰서(4차) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	건설총괄부장,서 울 특 별 시 장(재무과장)
주무관	임양수		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	전결 01/29 한동근
협조자	주무관	문병종		경리과장	代김선익		기획예산과장	최갑영
시행	도시철도토목부-1157	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8, 9층(무교동)	/
전화	02)772-7125	/전송	02)772-7306	/	lys100@seoul.go.kr	/	부분공개(5)