문서번호	시설과-693
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
전지연	한종수	이종한	01/29 이용태
협 조

남산 국궁장(석호정) 시설 개선사업 시행계획

2015. 01. 29.

중부공원녹지사업소

(시설과)

남산 국궁장(석호정) 시설 개선사업 시행계획

국궁장(석호정) 및 주변 시설을 정비하여 프로그램 운영 및 전시관 설치로 국궁문화 활성화에 기여하고,안전사고 예방 및 노후시설 정비로 이용자의 편의도모

1		사 업 개 요

○ 위    치 : 중구 장충동2가 산14-21

○ 규    모 : 안전 울타리 휀스설치 1,000㎡ 및 석호정 정비

○ 사업기간 : 2015. 01. ~ 11.

○ 사업내용

․안전휀스설치 1,000㎡, 체험과녁 데크 및 과녁길 정비

․건물도색 및 주변 포장정비

○ 사 업 비 : 480백만원

▢ 세부사업 추진일정

○ 2015. 01. : 사업계획수립

○ 2015. 02. : 기술용역타당성 심사

○ 2015. 03. : 실시설계용역 시행

○ 2015. 04. : 계약심사요청 및 공사발주

○ 2015. 05. : 공사착공

○ 2015. 11. : 공사준공

2		행정사항

○『남산 국궁장(석호정)시설 개선사업』에 대하여 실시설       계용역 시행후 계약심사 및 사업시행

○ 예산과목 : 남산 및 산하공원 시설물보수정비사업(보수정비),      시설비(100-401-01)

붙 임 : 현황사진 및 위치도 1부.  끝.