투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 한강공원 이용시설안내 정비 공사

1. 시설관리과-249(2015.1.29)호 관련입니다.

2. 시설관리과에서 시행하는 「한강공원 이용안내시설 정비공사」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체(대표자)	계약금액(원)	공사기간
한강공원 이용안내시설 정비	(주)건웅 **********	262,000,000	2014.5.23. ~ 2015.1.31

나. 변경내역

- 내역변경(붙임 문서 참조)

- 계약금액 및 공사기간 변동 없음

다. 변경사유

- 한강공원 진입 안내표지판 및 공원안내표지판 현장여건에 따른 시공 수량 변경

- 부대공(현장 사무실 및 공사안내간판 등) 정산처리 등

붙    임 : 변경계약 요청 의뢰서 일체. 끝.

주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	01/29 이상국
협조자
시행	총무과-1450	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송		/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개