문서번호	시설관리과-267
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
이나영		박희철	01/29 차광재
협조	총무과장		최대봉
	주무관		유충현

폐기물처리용역 설계변경(제2회_준공)

- 한강공원 뚝섬자전거도로 이전공사외 1건 -

2015. 1

한강사업본부

(시설관리과)

폐기물처리용역 설계변경(제2회_준공)

뚝섬자전거도로 이전공사외 1건 건설폐기물 처리용역을 시행함에 있어 공사완료에 따른 건설폐기물 발생량이 변경(감)되어 아래와 같이 설계변경 시행코자 함

용역개요

용 역 명 : 뚝섬한강공원 자전거도로 이전공사외 1건 건설폐기물 처리 용역

용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리

- 폐기물 운반 1,500㎥, 폐기물 처리 3,450톤

용역기간 : 2014. 6. 16 ～ 2015. 1. 30

용 역 비 : 73,600,000원

도 급 사 : ㈜한진산업  김 상 현

변경사유 및 내용

공사 완료에 따른 건설폐기물 발생량 정산

공 종	규 격	단 위	물 량			비 고
			당 초	변 경	증ㆍ감
폐기물운반비	건설폐기물	㎥	1,500	1,209	-291
폐기물처리비	폐콘크리트	톤	2,000	1,798	-202
	폐아스콘	톤	1,450	1,004	-446
	계	톤	3,450	2,802	-648

설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 액	비 고
총용역비	73,600,000	65,096,000	감)8,504,000

조치의견

위와 같은 내용으로 설계 변경하여 정산처리코자 함

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.