문서번호	급수운영과-1765
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장		급수운영과장	서부수도사업소장
김홍준		장종욱	01/29 김홍기
협 조
	시설관리과장			박길영
	시설관리팀장			이선재
	주무관			전성호

2015년

소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

2014. 1.

서부수도사업소

(급수운영과)

2015년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

고품질 아리수를 단수 및 정체수 없이 공급하기 위한 2015년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획을 보고함.

※ 추진근거 : 2015년 소블록 배급수관망 개선사업 계획 알림(누수방지과-582, 2015.01.22)

□ 사업개요

○ 사업목적

- 고립 지역의 단일 배관을 이중화하여 단수없는 누수복구 체계 구축

- 관말 정체수 발생지점에 순환 배관망을 형성하여 수질 저하 방지

	⇒

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

○ 사 업 비 : 5,281백만원(148개소, 8.193㎞)

○ 연차별 추진계획                                  (단위:백만원)

계 (집행금액)	연 도	계	2014년	2015년	2016년	2017년
	사업비(백만원)	5,281	273 (213.1)	386	2,808	1,814
	대상(건)	148	35	40	35	38
	연장(㎞)	8.193	0.623	0.737	4.003	2.830
단일배관 이중화	사업비(백만원)	3,336	124 (66.5)	80	1,847	1,285
	대상(건)	22	4	1	4	13
	연장(㎞)	5.036	0.18	0.15	2.889	1.817
단절관 순환관망	사업비(백만원)	1,928	132 (129.6)	306	961	529
	대상(건)	124	29	39	31	25
	연장(㎞)	2.957	0.243	0.587	1.114	1.013
노후 인입관 정비	사업비(백만원)	17	17 (17)
	대상(건)	2	2
	연장(㎞)	0.200	0.2

□ 2015년 추진계획

○ 추진 대상 : 총 40개소(0.737㎞)

- 단일배관 이중화 : 80백만원(1개소, 0.15㎞)

- 단절관 순환관망 : 306백만원(39개소, 0.587㎞)

○ 소요 예산 : 386백만원

○ 추진방법

- 공사가 소규모이고 3개구에 산재되어 있는 지역여건을 감안 각 지역별 연간단가 공사로 시행

- 도로굴착 통제로 인해 2015년도 내 사업추진이 불가할 경우 본부와 사전 협의 후 대체 정비구간 검토

- 2015. 2월까지 현장 조사 및 도로굴착 협의

- 2015. 3월 초 착공, 9월 말까지 정비완료

□ 향후계획

○ 본부계획에 따라 연차별 추진 계획 재수립(3월 말 예정)

- 사업 기간 변경 : [당초] ‘14년 ~ ’17년 → [변경] ‘14년 ~ ’18년

- 사업 물량 조정 : 기 정비 완료 대상 제외, 신규 정비 대상 추가

붙임 : 2015년 소블록 배급수관망개선 사업 대상 1부. 끝.