함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	용역기간 연장에 따른 변경계약 의뢰

1. 우리 정수센터에서 시행중인 「암사아리수정수센터 취·정수장 시설물 정밀안전진단 용역」의 용역기간을 연장하고 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 암사아리수정수센터 취·정수장 시설물 정밀안전진단용역

나. 용역기간 : 2014. 5. 19. ~ 2014. 12. 14

다. 도 급 액 : 214,318,000원(변경없음)

라. 도 급 자 : ㈜한국시설안전연구원 대표 안평기 외 1

마. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

바. 용역기간

- 당  초 : 2014. 5. 19 ~ 2014. 12. 14

- 변  경 : 2014. 5. 19 ~ 2015.  5. 29

사. 용역기간 연장 사유 : 정수장 운영 및 청소일정에 따른 일부 담수구조물 조사누락에 따른 추가조사 기간 필요

붙  임 : 1. 설계변경 시행 내부 방침서 1부.

2. 용역기간 연장 및 사고이월 검토 보고서 1부.

3. 합 의 서 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	강희권		정수시설과장	전결 12/12 남효돈
협조자
시행	정수시설과-3917	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131(암사3동)	/
전화	3146-5776	/전송	3146-5707	/	kkaann2@seoul.go.kr	/	대시민공개