투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	건설폐기물 처리용역 계약변경 의뢰

1. 시설관리과-267(2015.1.29.)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행하고 있는 한강공원 뚝섬자전거도로 이전공사외 1건 건설폐기물처리 용역에 대하여 아래와 같이 설계변경 하였기에 계약변경 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 뚝섬한강공원 자전거도로 이전공사 외 1건 건설폐기물 처리 용역

나. 용역대상 : 한강공원 전체

다. 용역개요 : 폐기물 운반 1,209㎥, 폐기물 처리 2,802톤

라. 용역기간 : 2014.6.16. ~ 2015.1.30

마. 용역업체 : ㈜한진산업  김 상 현

바. 변경 내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총 용 역 비	73,600,000	65,096,000	감)8,504,000

사. 변경사유

- 공사 완료에 따른 건설폐기물 물량 정산

붙임 : 1. 설계변경 방침서  1부

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	이나영		주무관	유충현		시설관리과장	01/30 박희철
협조자
시행	시설관리과-273	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25	/
전화	02-3780-0692	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개